문서번호	토목부-25831
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	代조양연	12/26 노우성

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 -

임시 차선 재도색에 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 -

임시 차선 재도색에 대한 검토 보고

개봉역주변 ASP 중층포장 완료구간에 기 시공된 임시차선이 장기간 사용에 따른 탈색 및 도색 시거상태 불량에 따라 차량 운전자 및 보행자의 안전사고가 우려됨에 따라 공사장내 임시차선 재 도색건에 대한 검토보고 임.

관련근거

○ 차선 재도색 업무지시 SMIH-14-36808(2014. 9. 5.)

공사개요

○ 위    치 : 구로구 개봉동 234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 사업규모 : 지하차도 설치 폭 4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2~3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015. 6.30.

○ 총사업비 : 58,597백만원

○ 시 공 사 : ㈜케이에쓰시건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

보고내용

○ 개봉역주변 ASP중층포장 구간 임시 차선의 장기간 사용에 따른 탈색 및 도장불량으로 인하여 안전사고가 우려되므로 임시 차선 재도색이 필요함.

- 횡단보도 주변 횡단보도(2개소) 및 정지선 재도색 : 융착식(수동식)

구 분	재 도색 연장(M)	차선폭	면적(M2)	비고
횡단보도	822.0	15cm/m당	123.30
정지선	45.0	15cm/m당	6.75
계	867.0		130.05

- 일반구간(남.북측측도) 재 도색 : 기계식(상온형)

구 분		재 도색 연장(M)	차선폭	면적(M2)	비고
페인트 (상온형)	백색 실선	853.0	15cm/m당	127.95
	백색 파선	1,010.0	15cm/m당	151.50
	황색 실선	4,675.0	15cm/m당	701.25
	문자	193.0	15cm/m당	28.95
	소계	6,731		1,009.65

○ 임시 차선도색 전∙후 현황 사진

임시차선 재 도색 (전)	임시차선 재 도색 (후)	비고
남측측도 : 개봉고가하부 ~ 개봉역

공사비 증·감 내역

(단위:원)

구 분		상온형	융착식	계	비고
임시차선 재 도색	설치 수량	배색실선 : 156.90㎡ 백색파선 : 151.50㎡ 황색실선 : 701.25㎡ 계 : 1,009.65㎡	횡단보도 : 121.75㎡ 정지선 : 8.25㎡ 계 : 130.00㎡	1,139.65㎡
	공사비	5,048,000원	3,994,000원	9,042,000원

감리단 검토의견

○ 공사장 주변 임시차선 재도색 시공부에 대한 검측을 실시한 결과 『교통안전시설(노면표시)기준』에 적정하게 시공되었으며.

○ 또한, 차선도색에 대한 공사비 산출서를 검토한 결과 상온형(2014년 표준품셈 적용) 및 융착시(서울시 교통안전시설(노면표시) 일위대가)에 대한 공사비는 적정하게 산출되었으므로 설계변경에 반영 하는 것이 타당하다고 판단 되며. 증액되는 9,042천원에 대하여는 본부 승인 후 추후 설계변경에 반영 하고자 함.

조치계획

○ 임시차선 재도색에 대하여는 감리단 의견과 같이 승인하고자 함.

- 추가 공사비 9,042천원

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.   끝.