문서번호	재생지원과-484
결재일자	2013.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	실태조사사업팀장	재생지원과장		주거재생정책관
허동	김용덕	배경섭		01/14 진희선
협 조	재생지원계획팀장		임인구
	실태조사관리팀장		조남성

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고 (14차)

2012. 12.

주 택 정 책 실

(재생지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고(17차)

우리시에서 시행중인 정비예정구역 실태조사 용역에 대한 주간공정회의(17차)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		회의 개요

목    적 : 실태조사 용역 주간공정 보고

일    시 : 2013. 1. 11(금) 14:00∼16:00

장    소 : 신청사 9층 공용회의실

참 석 자 : 18명

❍ 내 부 : 실태조사사업팀장, 실태조사관리팀장, 구역별 담당자 8명

❍ 외 부 : 권역별 책임 및 분야별기술자 8명

회의안건

○ 실태조사 용역 공정관리 검토

○ 사업성분석 T/F자료 진행사항 검토

○ 기타 현안사항 검토

Ⅱ		회의 결과

공정현황(양호 : 5권역, 정상 : 3권역)

권 역 명	공 정 율			비고
	계획	실시	대 비
계	76.49%	79.49%	103.92%	정 상
북 측 1권역	78.50%	78.50%	100.00%	정 상
북 측 2권역	70.00%	76.40%	109.10%	양 호
동남측 1권역	82.20%	83.60%	101.70%	양 호
동남측 2권역	60.28%	72.31%	120.00%	양 호
서남측 1권역	82.19%	85.50%	104.03%	양 호
서남측 2권역	88.50%	89.30%	100.90%	양 호
뉴타운 1권역	78.10%	78.10%	100.00%	정 상
뉴타운 2권역	72.21%	72.21%	100.00%	정 상

진행내용

○사업성분석 검증 T/F  진행

- 대  상 : 78구역【90구역 중 12구역 제외(해제 2건, 해제추진 10건】

- 시세조사 및 맵핑 완료 : 64구역

- 감정평가 완료 : 66구역

기타 사항(지시사항)

○ 사업성분석 PT자료 담당자별 검토 후 확정(엑셀자료는 PT로 변경)

○ 사업성분석 검증 T/F 완료 후 서울연구원에 PT자료와 기 통보한 엑셀서식을 작성 통보하여 검증 받은 후 주민의견청취 시행

○ 해제 신청 및 노후도 미충족 등으로 해제된 구역 공정표에 의거 작업현황 정리

따로붙임 1) 공정회의 자료 1부.

2) 참석자 현황 1부.

3) 사진대지 1부.  끝.