내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기의뢰

우리과에서 추진하고 있는 “청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계”에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 준공기한 연기 대상

용역명	계약업체		계약기간	계약금액 (원)	비 고
	상호	대표자
청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계	㈜동해종합가술공사	정점래	2014.07.25 ～ 2015.01.23	160,219,800

2. 변경내용

가. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 07. 25 ~ 2015. 01. 23

- 변경 : 2014. 07. 25 ~ 2015. 06. 30

나. 계약금액 : 변경없음

3. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기방침서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	이병우		청계천관리팀장	김석권		하천관리과장	12/26 김용학
협조자
시행	하천관리과-20174	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문청사1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3892	/전송	02-2133-1044	/	lebywo@seoul.go.kr	/	대시민공개