문서번호	시설관리과-34915
결재일자	2014.12.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장
이연한	한상근	나태산		12/26 안운길
협 조	행정관리팀장		代은정호
	주무관		선미애

길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

사 고 이 월 보 고

2014. 12.

중부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)사고이월보고

우리사업소에서 시행중인 『길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)』와 관련하여 사고이월 사유가 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

공사 현황

공 사 명 : 길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

공사개요 : D=600mm L=70m

공사기간 : 2014.12.16. ~ 2015.01.24

도 급 액 : 137,907,000원

도 급 자 : **************

예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비등, 시설비(송배수관정비)

사고이월액 : 188,000천원(지출원인행위 미필이월금액 : 50,093천원)

보고 내용

본 공사는 길음교(현수교) 노후 송배수관을 정비하여 적수발생 등 수질사고 및 누수발생을 사전에 예방하여 시민에게 수돗물을 안정적으로 급수코자 시행된 신기술 적용 공사로서, 비굴착갱생(신기술) 공법후보군 선정위원회 개최(2014.09.23.) 및 본청 신기술 적용활용심의위원회 개최(2014.10.31.) 후 본부 계약심사과의 계약심사 결과 통보(2014.12.03.)등 행정적 절차로 인해 2014.12.05 발주되어 2014.12.16 착공된 공사이며, 준공기한이 2015.01.24까지 이므로 공사의 특성상 겨울철 낮은 온도로인해 신기술 적용이 어려워 공사가 중지된 상태로 절대공기 부족에 따라 사고이월이 불가피한 실정임.

계약이행기간연장 처리업무 개선시행 : 경리13300-236(2002.02.08)호 및 시장

방침 제136호

∘발주부서의 당초 절대공기 기간을 계약이행 기간으로 적용 계약(사고이월대상으로 개선표기)

∘준공기한 연기절차 생략

조치 의견

상기 보고내용과 같이 도급자와 계약기간이 2015.01.24.까지이며,절대공기 부족에 따라 당해연도(2014년)에 준공처리가 불가하여 사고이월 조치코자 합니다.

붙임 : 1. 사고이월 명세서 1부.

2. 사고이월 사업별 명세서 1부.

3. 원인행위부(추산부) 1부.  끝.