내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 설계변경 및 준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인『수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획』용역에 현황측량 및 전문가 자문비용 추가로 인한 설계변경이 있어 아래와 같이 계약변경을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획

나. 용역기간 : 당초(2014. 6. 30 ~ 2015. 2. 24)

연기(2014. 6. 30 ~ 2015. 6. 30)

다. 계약금액 : 170,211,900원

라. 계 약 자 : ㈜한일이엔씨 손흥일+상명종합건축사사무소 손동준

마. 변경내역

구 분		금 액(원)		증 감
		당 초	변 경
총 용 역 비		170,211,900	183,676,000	증 13,464,100
도급비	공급가액	153,998,090	166,260,000
	부 가 세	15,473,810	16,626,000
	손배공제료	740,000	790,000
	계	170,211,900	183,676,000

붙임 1) 설계변경 보고서(변경내역서 포함) 1부.

2) 준공기한 연기조치의뢰서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	이병우		청계천관리팀장	김석권		하천관리과장	12/26 김용학
협조자
시행	하천관리과-20173	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문청사1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3892	/전송	02-2133-1044	/	lebywo@seoul.go.kr	/	대시민공개