내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 재의뢰(서울혁신파크 시설관리 용역)

1. 서울혁신파크 시설관리용역 변경계약 체결 계획(사회혁신담당관-12926, 2014.12.22.)과 관련입니다.

2. 서울혁신파크 시설관리 용역과 관련하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시면 감사하겠습니다.

가. 계약건명 : 서울혁신파크 시설관리 용역

나. 계약기간 : 2014. 4. 1. ~ 2014.12.31.

다. 계약업체 : ㈜신성씨앤지

라. 변경사항

· ’14. 3.27. 최초 계약 체결시의 당초 계약기간(1년)으로 연장

· ’14. 3.27. 계약 당시의 원가산출에 따라 연장기간에 해당하는 금액 증액

· ’14.10.28. 인력(1명)증원 변경계약에 따른 금액 증액

구 분	계 약 기 간	계 약 금 액
변경전	2014. 4. 1. ~ 2014.12.31.	￦685,502,440
변경후	2014. 4. 1. ~ 2015. 3.31.	￦923,753,400
차 이	3개월 연장(총 1년)	증 ￦238,250,960

붙 임 1. 서울혁신파크 시설관리용역 변경계약 체결 계획 각 1부.

2. 합의각서 및 산출내역서 각 1부.  끝

	사회혁신담당관
★주무관	노태형		혁신기반팀장	안현민		사회혁신담당관	12/26 배형우
협조자
시행	사회혁신담당관-13068	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 2층 사회혁신담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6329	/전송	02-2133-0744	/	tipnoh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)