문서번호	도로관리과-714
결재일자	2013.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도로포장관리팀장	도로관리과장		시설안전정책관
지세진	김영철	이광석		01/14 고인석
협 조

「2013년도 포장도로 유지보수 공사 구간」

포장상태 점검 계획

2013. 01

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『2013년 포장도로 유지보수 공사 구간』

포장상태 점검 계획

효율적인 예산운용을 위하여 도로사업소에서 수립한 2013년 포장도로 유지보수 공사 구간에 대해서 도로상태지수 산정결과에 대한 적정 여부를 점검하여 쾌적한 도로환경 조성에 만전을 기하고자 함		비

Ⅰ		포장도로 예산현황

'13년 포장도로 유지보수 예산 현황 : 50,052백만원

○ 노후포장도로 정비공사 : 41,813백만원

(맨홀 유지보수비 4,200백만원 포함)

○ 긴급복구공사 : 8,239백만원

Ⅱ		포장도로 정비방향

도로정비 방법을 사후적 보수에서 예방적 정비로 전환하여 소파발생 최소화 ⇒ 사고없는 도로환경을 조성하여 도시안전 구현 정비로  ○ 포장도로 전폭 보수 지양 → 노후구간에 대한 차로별 정비 유도

○ 차로별로 거북등 균열, 소파(포트홀)발생이 많은 지역을 우선 정비

현 조사 방법

○ 도로사업소 담당자가 육안 조사

○ 전체 차로에 대한 포장상태 지수를 평가한 것이 아니고 대표차로를 평가

Ⅲ		점검 및 조치 계획

점검 기간 : 2013.01.15～01.18

점검 내용

○ 2013년 아스팔트 포장정비계획 구간의 포장상태 및 정비 규모의

적정성 여부

점검 방법

○ 점검방법

- 2인1조로 점검반을 편성하여 도로사업소 담당자와 합동점검

- 도로관리과(6명) : 지세진, 김상훈, 안동국, 윤상열, 김덕남, 이문석

도로사업소에서 요구한 노후 포장도로 정비 계획 및 점검자

사업소명	노 선 명	연장(m)	면적(a)	점검자
계		302,325	16,590
동부	언주로 등 11개 노선	23,950	2,607	김덕남, 윤상열
서부	퇴계로 등 22개 노선	73,597	2,618	김상훈, 안동국
남부	방배로 등 19개 노선	21,917	2,708	김덕남, 윤상열
북부	창경궁로 등 16개 노선	50,415	3,190	지세진, 이문석
성동	아차산로 등 22개 노선	42,351	2,469	지세진, 이문석
강서	남부순환로 등 17개 노선	90,095	3,000	김상훈, 안동국

조치 계획

○ 포장상태가 양호한 구간은 2013년도 아스팔트포장 정비계획에서 제외

○ 거북등 균열 등이 심한 구간은 보조기층 이상 정비

○ 정비계획 구간에 대해서 코아채취를 시행하여 포장두께 결정

Ⅵ		행정 사항

○ 도로사업소에서는 점검차량 준비

붙임 : 2013년 포장도로 유지보수 공사 계획1부. 끝.