문서번호	정수시설과-3525
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	12/26 차윤기
협 조

안전하고 깨끗한 아리수!  세계로 진출하는 아리수!

광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

2014. 12.

서울특별시 광암아리수 정수센터

(정수시설과)

『광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행하는 『광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사』 설계변경에 따른 사전심의 소위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사

○ 용역기간 : 2014. 07. 21 ~ 2014. 12. 26

○ 공사규모

- 당초 : 외곽 보안등 66본 설치, LED 광원개선 66등, 분전반 1면, 덕트 150m 설치, 기타 케이블 및 배관공사 1식 등

- 변경 : 외곽 보안등 75본 설치, LED 광원개선 145등, 분전반 1면,  기타 케이블 및  배관공사 1식 등

○ 도 급 액 : 143,478,370원(당초) → 134,020,000원(변경)

○ 도 급 자 : 주식회사 태강 대표 김상민

Ⅱ		심의위원회 개최 개요

○ 개최일자 : 2014. 12. 26(금)  13:30~14:00

○ 개최장소 : 정수시설과 사무실

○ 심의내용 : 물량 증․감 적용 적정여부, 설계변경 내역 적정여부

○ 참석위원 : 정수시설과장 김창현외 4명

Ⅲ		개최결과 및 조치의견

○ 설계변경심의소위원회를 개최하여 설계변경 적정여부에 대한 심의결과 심사위원 전원 검토내용 적정의견 제시함.

○ 심의위원 모두 적정의견으로 설계변경 원안대로 공사를 시행코자 하며, 계약부서에 계약변경 의뢰코자 함.

붙임 : 설계변경 심의 소위원회 개최 의견서 1부.  끝.