문서번호	기전설비과-8615
결재일자	2014.12.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
유통희		서대훈	12/26 박용철
협 조
	기획예산과장			代박진기

암사 약품주입설비 제작구매설치 및 부대전기공사

사고이월계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

생  산  부

(기전설비과)

암사 약품주입설비 제작구매설치 및 부대전기공사

사고이월 계획보고

암사정수센터 약품주입(AOP+Quenching)설비 제작구매설치 및 부대 전기공사에 대하여 공사추진과 겨울철 오존과 과수반응 시험데이터 확보를 위해 2014년 회계연도 사업예산을 사고이월 시키고자 함.

	사업 개요

Ⅰ

기계분야

- 건    명 : 약품주입(AOP+Quenching)설비 제작 구매설치

- 계 약 자 : 원진기계(주) 대표 정용원

- 계약금액 : 471,717,640원

- 계약기간 : 2014. 11. 05 ~ 2014. 02. 03

전기분야

- 건    명 : 암사정수센터 약품주입설비 전기공사

- 계 약 자 : 부력전력(주) 대표 윤영배

- 계약금액 : 54,897,000원

- 계약기간 : 2014. 12. 24 ~ 2015. 01. 30

	사업예산 사고이월

Ⅱ

이월사업 현황

건 명	공사기간	사업비(원)	예산과목
계 2건		530,314,940	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,시설비 (암사정수센터 고도정수처리시설공사)
약품구입설비 제작구매설치	2014.11.5. ～ 2015.02.03.	475,417,940
암사정수센터 약품주입설비 전기공사	2014.12.24.~ 2015.01.31.	54,897,000

이월사유

- 약품투입설비 설치 및 부대 전기공사 추진

- 겨울철 저 수온기(1월)에 오존(O3)과 과수(H2O2) 반응시 과수 소모가 증가되는 현상에 대한 충분한 시험운전 실시

	행정사항

Ⅲ

기획예산과 : 2014년 사업예산 사고이월

붙임 : 계약서 및 합의서 각1부.  끝.