문서번호	하천관리과-20172
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		청계천관리팀장		하천관리과장
이병우		김석권		12/26 김용학
협 조

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』용역 준공기한 연기 검토보고

2014. 12.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	㈜동해종합기술공사)	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』용역

준공기한 연기 검토보고

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』용역에 대한 청계천   시민위원회 설계방향 추가논의 등 절대공기 부족으로 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계

❍ 용역기간 : ‘14. 7. 25. ~  ‘15. 1. 23.

❍ 용역업체 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

❍ 용 역 비 : 160,219,800원

□ 추진경위

❍ 2014. 08. 22 : 용역 착수보고

❍ 2014. 10. 17 : 전문가 자문회의 개최

❍ 2014. 10. 31 : 1차 중간보고회 개최

❍ 2014. 12. 19. : 2차 중간보고회 개최

□ 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기내용

구 분	과업기간	용역비	비고
당 초	‘14. 7. 28 ~ ’15.1. 23	160,219,800원	용 역 비 변동없음
변 경	‘14. 7. 25 ~ ’15.6. 30

❍ 연기사유

- 청계천시민위원회 및 3개분과회의 설계방향 추가논의 약2개월 추가 소요

- 기본설계안에 대한 기술심의 결과를 반영하여 실시설계도서 작성,투자심사 등의 절차이행을 위하여 약3개월 추가소요에 따라 용역기한 연기가 필요함

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

❍ 청계천시민위원회 논의, 기본계설계(안)에 대한 설계심의, 실시설계도서 작성, 투자심사 등 과업 수행에 필요한 절대공기가 부족한 실정으로 준공기한 연기는 타당하다고 판단

❍ 준공기한을 2015년 6월 30일까지 연기조치의뢰코자 함

붙임 : 설계사 공문서 및 준공기한 연기조치의뢰서 각1부.  끝.