문서번호	시설관리과-32685
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김기봉	이철구	전결 12/26 이시우
협 조

배수관 부설계획보고

동부수도사업소

시설관리과

배수관 부설 계획

중랑구 신내동 777번지 급수공사신청과 관련 신청지앞 배수관이 부설되어 있지않아 D=100mm,L=150M을 부설하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 관련공문 : 현장실정보고서 이준100-96』

❍ 위    치 : 중랑구 신내동 777번지

❍ 지시번호 : 신설171번

Ⅱ		보고 내용

연번	위 치	GIS상 관로현황			보고내용	비고 (공사개요)
		부설년도	관종	구경
1	중랑구 신내동 777번지앞	1996	DCIP	100	신내동 777번지 급수공사 신청이 있어 현장조사 및 횡단굴착 결과 신청지 앞 배수관이 부설되어 있지 않아 배수관을 부설해야 급수공사가 가능한 실정임	D=100mm L=150m

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기와 같은 사항으로 신내동 777번지 앞 도로에 배수관 D=100mm,L=150M를 부설하고자 하며,

❍ 당초 공사기한이 2014년12월31일까지로 동절기 및 굴착협의등으로 공사기한안에 작업이 불가하여 아래와 같이 공사기한을 연기하여 급수공사 시행에 차질이 없도록 하고자 합니다.

지시번호	위치	당초작업기간	변경작업기간	비고
1	중랑구 신내동 777	2014년 12월5일 ~2014년 12월31일	2014년 12월5일~ 2015년 01월31일

❍ 공사개요

연번	위치	공사개요	소요예산(도급비)	비고
1	신내동 777	D=100mm L=150m	15,000천원

❍ 위 치 도

따로붙임 : 현장실정보고서 1부. 끝.