문서번호	주거환경과-383
결재일자	2013.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주거환경지원팀장	주거환경과장		주거재생정책관
전재진	송종훈	최성태		전결 01/15 진희선
협 조
	주무관		고병호

주민참여형 재생사업

지구단위계획 수립용역 설계변경(영등포구 대림동)

2013.  1

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 ■
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

주민참여형 재생사업

지구단위계획 수립용역 설계변경(영등포구 대림동)

주거환경관리사업 계획수립 용역중인 영등포구 대림동은 중국동포 등이 밀집하여 거주하는 다문화지역으로 거주민간의 융화를 위해 지역적 특성을 고려한 공동체활동(커뮤니티) 및 방안 도출을 위한 설계변경(과업내용 추가) 시행코자 함.

- 시장 지시사항(‘12.10.30, 시의원(유광상) 면담)

구역현황

○ 위   치 : 영등포구 대림2동 1027-1번지 일대

○ 규   모 :  40,780㎡, 228동

○ 용도지역 : 제2종 일반주거지역

○ 주민현황 : 총 1,532명, 804세대(소유자 261가구, 세입자 543가구)

※ 46%는 외국인이며, 대부분 중국동포임.

○ 주민동의율 : 소유자 57%, 세입자 60%

용역개요

○ 업 체 명 : (주)건원 건축사 사무소 + (주)인토 엔지니어링

○ 용역기간 : ‘12. 8. 20 ~ ‘13. 6. 19(10개월)

○ 용역금액 : 166백만원

추진현황

○ ′12.05.03 : 주거환경관리사업 대상지선정

○ ′12.08.20 : 지구단위계획 용역 착수

○ ′12.08.27 : 총괄계획가(MP) 선정 (김영욱 세종대 교수)

○ ′12.09.~12 : 주민설명회 개최(5회)

○ ′12.10.~12 : 총괄계획가 회의개최(5회)

○ ′12.11.18 : 주민협의체 구성(김선엽 외 23인)

설계변경 내용

○ 본 사업구역은 중국동포 밀집지역으로 다문화에 대하여 인문 ․ 사회적 특성을 살펴보고, 거주민간의 융화를 위한 공동체 활동(커뮤니티) 발굴 및 프로그램 도입을 위해 전문가로 하여금 정량적, 정성적 연구를 통한 지역 거주민들이 현실적으로 필요로 하는 계획 및 방안 도출

소요예산

○ 당초 계약금액 : 166,600천원

○ 변경 계약금액 : 185,000천원  - 증) 18,400천원

※ 예산과목 : 평생살고싶은마을만들기추진, 쾌적한주거환경조성, 주거지재생사업추진(도정), 주민참여형주거지재생사업계획수립, 시설비(204-401-01)

조치의견

○ 현재 추진중인 영등포구 대림동 지구단위계획 수립용역에 과업추가하여 설계변경.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 과업변경 내용서(과업추가) 1부.  끝.