투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용 허가기간 연장 신청서 제출

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원하며, 강남구 안전건설과-21644(2014.8.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진하고 있는 동호대교 남단 진입램프 개량공사의 가설 현장사무실 설치를 위한 도로점용 허가사항에 대하여 아래와 같이 도로점용 허가기간 연장을 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점용위치 : 강남구 논현로 189길(압구정고가 하부)

나. 허가번호 : 980(2014. 8.18)

다. 허가기간 : 당초 2014. 8.19. ~ 2014.12.31

변경 2014. 8.19. ~ 2015. 5.31.

라. 점용면적 : 81㎡(변동없음)

마. 연장사유 : 공사기간 연장(2014.12.12 → 2015. 4.30)

붙 임 : 1) 도로점용 허가기간 연장 신청서 1부.

2) 가설건축물 축조신고서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		교량보수과장	12/26 박춘배
협조자
시행	교량보수과-4009	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1581	/전송	02)2210-1587	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개