문서번호	토목부-25709
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	12/26 노우성
협조
	주무관		양준식

교대역 인접 하수박스 하부공동 지반보강 완료보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교대역 인접 하수박스 하부동공 지반보강 완료보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

도로함몰과 관련하여 교대역~서초역 구간 현장조사 결과 교대역 부근 하수박스 하부에 동공이 확인되어 지반보강울 시행하고, 이에 대한 보고임.

관련근거

❍ 도로관리과-15299호(`14.10.13.) 교대역 도로함몰 구간 지반조사 결과 알림

❍ 동기강 2014-400호(`14.12.24.) 하수박스 하부공동 보강공사 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 4,000백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10.1.~`15.2.28.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

추진경위

❍ `14.08.29. : 교대역 주변 도로함몰 관계관 회의개최 결과 통보(도로관리과)

❍ `14.09.30. : 도로함몰 구간 GPR탐사 결과 알림(남부도로사업소)

❍ `14.10.08. : 도로함몰 구간 지반조사(코어)결과 보고(남부도로사업소)

❍ `14.10.13. : 도로함몰 구간 지반조사 결과 알림(도로관리과)

❍ `14.10.17. : 지반보강공사 시행 업무연락(도기본)

보고 내용

❍ 지반조사결과

- GPR탐사 및 코어천공 조사 결과 상수도관이 통과하는 지점 부근에 L= 8~10m, B=7.5m, D=0.8m 내외의 공동이 확인됨.

❍ 지반보강방법

구 분	적용공법	비고
주입간격	1.4~1.5m(하수박스 철근간격 고려)
주입압력	3kg/㎠ 이하
천공	24개소/ 깊이 400mm
천공경	평균 50mm(몰탈주입 시 폐색방지 고려)
주입재	몰탈주입
주변영향	BOX천공 후 토사 천공없이 몰탈 주입하여 주변 영향 없음

❍ 수량 변경 증･감

공 종	단위	당 초	변 경	증･감
구멍뚫기(Φ35mm)	개소	-	12	12
천공홀 무수축콘크리트	개소	-	12	12
구멍뚫기(Φ75mm)	개소	-	12	12
천공홀 무수축콘크리트	개소	-	12	12
몰탈주입	M3	-	54	54
몰탈주입기 임대 및 설치･해체	식	-	1	1
그라우팅	M3	-	8	8
철근탐사	식	-	1	1
GPR탐사	식	-	1	1
물돌리기	M2	-	12	12
바닥청소 및 슬러지제거	M2	-	79	79
교통통제 및 안전처리	일	-	8	8
임시조명 설치	M	-	180	180

❍ 공사비 증･감 비교 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증･감	비 고
부대공	천 공	-	2,651	2,651
	몰탈주입	-	37,109	37,109
	GPR탐사	-	21,205	21,205
직접공사비		-	60,965	60,965
간접공사비		-	6,308	6,308
공급가액		-	67,273	67,273
V.A.T		-	6,727	6,727
총공사비		-	74,000	74,000

조치계획

❍ 소요공사비는 상수도사업본부(50백만원)와 도로관리과(24백만원)에 예산재배정 요청하고

❍ 감리단 검토의견에 따라 승인통보하고 우리본부 설계변경 소(본부)위원회 심의를 거쳐 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.