문서번호	설비부-14842
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이동기		이달영	12/26 박기형
협조

『송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』

관급(수배전반) 물량변경 검토 보고

2014.  12.

『송정 외 1개소 빗물펌프장 증설』

관급(수배전반) 물량변경 검토 보고

감리단으로부터『송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사』관급(수배전반) 물량변경 보고에 따른 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사(관급)

○ 규    모 : 수배전반 23면, 분전반 2면, LOP 6면

○ 공사기간 : ’13.04.29. ~ ’15.01.31.

○ 도 급 사 : 일렉컴㈜, 대표 : 이기현

○ 계약금액 : 811백만원

설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	변경사유	비 고
LOP	- L.O.P 펌프조작반 6면	- L.O.P 펌프조작반 4면	- 자동 제어판넬과 계약이 중복되어 물량 삭제

설계변경 금액

○ 변경금액                                        (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 차	811,000,000	807,926,000	감)3,074,000

보고자 의견

○ 검토결과 감리단의 설계변경 보고가 타당함으로 승인하고 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.