문서번호	교통운영과-1038
결재일자	2013.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	교통운영과장	교통운영관		도시교통본부장
최용덕	마국준	박영섭		01/17 윤준병
협 조
	신호시설팀장		이기모

2013년 교통신호기시설  용역추진계획

2013. 1.

도시교통본부

(교통운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	도로이용자-차량,보행자	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(	계약상대자	)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 ■	(	시민 모니터링단	)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(	서울지방경찰청	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	계약상대자	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울지방경찰청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소	)	무 □

2013년 교통신호기시설 용역추진계획

우리시에 설치·운영 중인 교통신호기 유지관리 및 신호기 신설 및 보수 공사에 대한 시설정비, 실시설계, 공사감리 용역을 시행 하고자 함

Ⅰ		교통신호시설 개요

교통신호시설 현황

(`12.12.31 기준)

구 분	교통신호기					표지
	제어기	신호등	시각장애인용음향신호기	잔여시간표시기	보행자작동신호기	안전표지
2013년	3,662	164,213	7,938	7,910	410	234,518
2012년	3,591	154,604	6,356	6,543	341	230,554

2013년 사업별 예산

(단위 : 백만원)

구분	비 목	용역 (공사) 명		예 산 액
				2012년	2013년	증감액	증감율 (%)
용역	교통안전시설물 유지관리		소 계	2,650	2,650	-	-
			안전시설정비(신호등,표지)용역	2,650	2,650	-	-
공사	교통안전시설물관리		소 계	10,600	9,600	-1,000	-9.4
			교통신호기신설	3,000	2,770	-230	-7.6
			교통신호기보수	7,600	6,830	-770	-10

Ⅱ		사업 별 추진계획

안전시설정비(신호기,표지) 용역

1

□ 사업개요

❍  대   상  :  서울시 전역 교통안전시설물('12.12.31 기준)

❍ 사업기간  : `13. 3. 1 ～ `14. 2. 28 (1년)

❍ 사 업 비  : 2,650,000천원

❍ 용역내용

- 서울시 전역의 신호등 및 교통안전표지 정비 및 세척

- 24시간 보수체계 유지(상시점검ㆍ긴급 정비)

서울지방경찰청 업무지원

❍  인력현황 (68명)

계	도로사업소						경찰청	공단[본부]
	동부	서부	남부	북부	성동	강서
68	8	10	10	10	8	8	10	4

□ 추진경위

❍ 2006. 11. 16 : 교통안전시설 설치관리 협약서 체결(서울지방경찰청↔서울시)

❍ 2006. 12. 01 : 업무 인계ㆍ인수(서울지방경찰청 → 서울시)

❍ 2007년 ~ 현재 : 도로교통공단과 수의계약 체결, 시행

□ 용역발주 계획

❍ 계약방법 : 수의계약(2012년과 동일)

□수의계약 대상자 : 도로교통공단 서울특별시 지부

□수의계약 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에  관한 법률 시행령 제25조1항 8호 사목

( 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 계약)

도로교통법 제123조 ⑬항(국가나 지방자치단체가 위탁하는 도로교통 안전에 관한 업무)

❍ 예산과목 : 부서)교통운영과, 단위)교통안전시설물관리, 세부)공공운영비

□ 주요추진계획

지표분석을 통한 업무 효율화

❍ 계절, 유형별 정비사항을 예측 사전 파악ㆍ조치

- 태풍·우기전 시설물 점검, 개학 전 어린이보호구역 점검 강화

❍ 차량순찰 위주에서 도보순찰 강화(시민의 눈높이로 현장점검)

- LED신호등교체(2007~2009)에 따른 수명 증가로, 보행자 위주(음향신호기, 잔여시간표시기, 보행자작동신호기 등)의 정비 강화

❍ 민원 신고 시 신속한 현장 대응

- 접수에서 보수까지 2시간이내 신속 처리(대형 고장 제외)

❍ 서울시 전역의 신호등 및 교통안전표지 정비 및 세척

시민만족도 조사결과 반영ㆍ추진

❍ 민원처리의 실시간 보고체계 구축

- 스마트폰을 이용한 현장 상황(전ㆍ후 사진 전송 등) 신속 통보

❍ 작업차량의 차로 점유율 최소화

- 교통량이 많은 시간대 신속한 보수(추가인력 배치)

❍ 긴급 사항 외 도로교통법규 준수(주ㆍ정차 금지)

□ '12년 추진실적

❍ 도로상 불합리한 교통안전표지판 정비(총 597개 철거 등)

❍ 어린이보호구역(1,629개소) 내 신호기 일제점검, 정비(총 153건)

❍ 보행자작동신호기(410개소) 상시점검 체계 구축

❍ 시각장애인용 음향신호기 전수조사(상, 하반기) 실시(7,938개)

❍ 태풍(제15호 태풍 ‘볼라벤’)시 신속한 대처로 교통불편 최소화

- 방향 돌아간 신호등 및 표지판 등 총85건 정비(27개조 54명 투입)

❍ 업무실적

총계(건)	신호기					안전표지
	소계	LED교체	세척	음향신호기 잔여표시기	현수막,첨지물 제거 등	소계	위치교정탈ㆍ부착	세척	철거 등
229,687	178,934	1,706	59,208	81,225	36,795	50,753	10,259	38,381	2,113

교통신호기 신설 및 보수공사 실시설계용역

2

□ 사업개요

❍설계대상

- 각종 민원 및 서울지방경찰청 규제사항에 의한 신호기설치 실시설계

❍관련법령 : 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서 작성 등)

❍계약기간 : `13. 3. 1 ～ `14. 2. 28 (1년)

❍사 업 비 :  267,703천원(강남 131,306천원, 강북 136,397천원)

❍용역과업내용

신호기 신설

- 서울지방경찰청 교통안전시설 규제심의 결과 및 민원사항 설계

- 교통신호기설치 관련 현장조사 및 설계도서 작성

- 준공 후 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력

신호기 보수

- 해당 도로사업소에서 개선사업 및 이설공사 설계

· 시설물 노후에 따른 선로와 제어기, 지주 등을 교체･보수 설계

□ 실시설계업무 수행절차

규제승인(경찰청)

⇒

규제사항검토후 설계지시

(서울시)

⇒

현장조사,실시설계

(설계업체)

⇒

설계적정성 검토

(도로사업소)

⇒

공사시행

(감리)

⇒

교통안전시설자료관리시스템(T-GIS)입력

⇒

감리확인

⇒

준공(사업소)

□ 용역발주 계획

❍계약방법 : 제한입찰 (강남, 강북 권역으로 나누어 발주)→2012년과 동일

□입찰참가자격:  전력기술관리법제14조 규정에 의거 “전력시설물의 설계업”을 등록한 자로서 엔지니어링진흥산업법 제21조 규정에 의거 건설부분의 “교통전문분야(교통기술사보유)”로 신고한 자

□ 제한사항 : 최근10년간 5천만원 이상(누적합계액) 보유한 업체

※실적제한이유: 전문업체가 전문화된 설계인력으로 현장조건에 맞는 설계필요

※지역구분 : 강남권역(동부,남부,강서도로사업소), 강북권역(서부,북부,성동도로사업소)

❍ 예산과목 : 단위)교통안전시설물관리, 세부)교통신호기신설·교통신호기보수, 목)시설비 및 부대비  통계목) 시설비

□ 주요추진사항

❍ 완벽한 실시설계 구현

- 교통신호기 설치관리 메뉴얼에 의한 설계

- 신호기 설치· 보수에 완벽한 계획서. 설계도면, 기술계산서 등 작성

- 실시설계 도서에 교통기술사 검토 후 날인

❍ ‘12년도 추진실적

- 실시설계 1,891건(서울청 규제 305건, 개선사업 1,586건)

□ 사업효과

❍ 도로에 적합한 교통신호기 설치·보수공사의 완벽한 설계로 도로이용자의 교통불편 최소화

교통신호기 신설 및 보수공사 감리용역

3

□ 사업개요

❍감리대상 :  신호기 설치 및 보수공사에 대한 시공 감리

❍관련법령 : 전력기술관리법 제12조(공사감리 등)

❍기간 : `13. 3. 1 ～ `14. 2. 28 (1년)

❍사 업 비 :  497,630천원(강남 244,020천원, 강북 253,610천원)

❍용역내용

- 서울시 전체 교통신호기 신설 및 보수공사 대한 감리

- 교통신호기 시설물(신호등, 철주, 제어기 등) 자료입력(T-GIS)에 관한 사항

- 교통운영 선진화방안 추진공사에 대한 공사감리

- 도로교통 안전개선사업 추진공사에 대한 공사감리

□ 감리업무 수행절차

용역착수

․ 설계도서 검토

․ 현장검측 및 지시

⇒

관리방안 검토

․ 공정관리(계획,회의)

․ 품질·환경(적합,영향)   ․ 안전관리(안전지도)

․ 민원관리(방안수립)

⇒

시공감독

․ 설계도서 시공

․ 검측 및 지시사항

⇒

공사완료

⇒

준공검사

․ 관련자 현장확인

⇒

교통안전시설자료

관리시스템(T-GIS) 입력

□ 용역발주 계획

❍계약방법 : 제한입찰 (강남, 강북 권역으로 나누어 발주)→2012년과 동일

□입찰참가자격:  전력기술관리법제14조 규정에 의거 “전력시설물의 감리업”을 등록한 자로서 엔지니어링진흥법 제4조 규정에 의거 건설부분의 “교통전문분야”로 신고한 자

□ 제한사항 : 최근10년간 5천만원 이상(누적합계액) 보유한 업체

※실적제한이유: 전문업체가 전문화된 기술인력의 노하우(오결선 또는 오조작 시 즉각적인 교통사고 위험이 초래)로 현장 경험 업체 필요

❍예산과목 : 단위)교통안전시설물관리,   세부)교통신호기신설·교통신호기보수, 목)시설비 및 부대비  통계목)감리비

□ 주요추진사항

❍ 설계도서에 의한 완벽한 시공

- 설계도서의 시공 적정 여부를 체크리스트에 의한 감리

- 완벽한 품질관리, 시공관리, 안전관리에 대한 지도감독

- 공사기간내 완벽한 시공과 적정한 예산집행

❍ 시공 감리로 민원 최소화 이행

❍ ‘12년도 현장감리 건수 1,909건(강남 926건, 강동 983건)

□ 사업효과

❍ 설계도서에 따른 완벽한 시공으로 도로이용자의 편리성 도모

향후 추진 계획

4

❍ `13. 1. 21 기술용역타당성심사 심의요청(기술심사담당관)

❍ `13. 1. 28  계약요청(재무과)

❍ `13. 1. 30  입찰공고(재무과)

❍ `13. 2. 13  설계, 용역 적격심사(교통운영과)

❍ `13. 2. 20  낙찰자 선정(재무과)

❍ `13. 2. 26  계약체결(재무과)

❍ `13. 3. 01  사업착수(계약상대자)

따로붙임 : 1. 안전시설정비 계약방법 검토.  끝.