문서번호	도시철도토목부-533
결재일자	2013.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	9호선3과장	도시철도토목부장		도시철도국장
황왕연	김진팔	우남직		01/18 신한철
협 조
	건축공사과장		이경일
	시설전기과장		박성우
	주무관		이명수

『지하철9호선 917공구-8차』

공사내역 및 기간 조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 01

서울시도시기반시설본부

[도시철도토목부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

공사내역 및 기간 조정 검토 보고

[지하철9호선 2단계 917공구-8차]

930정거장 환승통로의 환승체계가 변경됨에 따라 8차공사에 포함된 환승통로의 후속공종(기계설비,건축,전기)을 터널 구조물공(라이닝) 및 연결통로 토공작업 등으로 공사내역 및 기간을 조정코자함

※ 본부장 방침 : 도시철도토목부 -10772(‘12.12.18)

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 서울지하철9호선 2단계 917공구 건설공사

○ 위    치 : 강남구 삼성동 광동한방병원~송파구 잠실동 아시아선수촌(아)

○ 공사규모 : 총 연장 1,590m(본선 1,425m  정거장 1개소 165m)

○ 도 급 비 : 113,194백만원

○ 시 공 사 : 지에스건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개사

○ 공사기간 : 2008.06.02 ~ 2014.02.01(8차 : 2012.03.06~2013.01.20)

○ 공 정 율 : 63.5%(2013.01.14 현재)

Ⅱ		추진경위

○ 2008.05.30 : 공사계약(총괄분)

○ 2012.03.06 : 8차분 공사 착수

○ 2012.12.18 : 본부장 방침(환승통로 변경)

○ 2012.12.20 : 환승통로 설계변경 지시(본부→책임감리)

○ 2013.01월 현재 : 환승통로 설계 조정

Ⅲ		현 황

○ 지하철 2호선 종합운동장역과 9호선 930정거장 환승대합시설을

당초 공조기계실을 이전하도록 계획하였으나 이전하지 않고 기존

2호선 종합운동장역 계단 및 대합실공간을 활용하도록 방침이 결정

【도시철도 토목부 - 10772(‘12.12.18)】

○ 8차공사에 포함된 후속 공종(기계설비, 건축, 전기)의 공사비를 터널구조물

(라이닝) 및 연결통로 토공작업 등으로 공사내역을 조정하고 2호선하부와

930정거장Top slab 작업공간이 협소하여 작업효율성 저하 등으로

공사기간을 조정코자함.

Ⅳ		공사내역 조정

(백만원)

구 분		공 종	당 초		변 경		비 고 (증,감)
			내 용	공사비	내 용	공사비
토목	본선터널	굴 착 인버트 라이닝	218m 351m 22.0m	2,627	218m 351m 351m	3,467	증) 840
	2-Arch터널	구조물	51.2m	375	51.2	375
	930정거장 (개착)	콘크리트 방 수	28,669㎥ 25,384㎡	6,665	27,677㎥ 24,454㎡	6,563	감) 102
	환승통로	토 공 가시설	17,856㎥ 197본	1,036	21,534㎥ 197본	1,237	증) 201
	연결통로	토 공 버팀보			5,922㎥ 85본	340	증) 340
	본선환기실	토 공 콘크리트 방 수	1,292㎥ 10,049㎥ 9,320㎡	2,558	- ㎥ 8,713㎥ 8,468㎡	2,140	감) 418
	기 타	현장사무실 조 경			250㎡ 1식	265	증) 265
	소 계			13,261		14,387	증) 1,126

구 분		공 종	당 초		변 경		비 고 (증,감)
			내 용	공사비	내 용	공사비
후속공정	건 축	2호선개보수	1식	366		-	감) 366
	전 기	2호선개보수	1식	154		-	감) 154
	기계설비	2호선개보수	1식	422		-	감) 422
	소 계			942		-	감) 942
기타	보험료	해빙기안전 점검지적 사항조치			계 : 감) 190 -국민연금 : 감107 -건강보험 : 감 83	감) 190	감) 190
	제경비및 물가변동	간 접 비 물가변동(1~3회)	1식	7,233	-간접비 -물가변동(1~3회)	7,239	증) 6
	소 계			7,233		7,049	감) 184
합 계				21,436		21,436	-

Ⅴ		조치계획

○ 상기 현황으로 8차공사에 대한 공사내역 조정 및 공사기간을 아래와 같이 시행코자 함.

○ 공사내역조정

- 환승통로 변경에 따른 후속공종(기계설비,건축,전기)을 터널 구조물(라이닝) 및 연결통로 토공․가시설공으로 조정

․ 기계설비,건축,전기공 :  감) 14억원

․ 터널 구조물공(라이닝) : 증) 11억원

소    계              감) 3억원

- 930정거장 구조물공 및 929E2 피난계단 조정 및 해빙기 감사지적사항인 보험료 정산(감) 조치

․ 930정거장 구조물공 및 929E2 피난계단 조정 : 감) 6.5억원

․ 해빙기 감사지적사항(보험료정산) 조치 : 감) 1.9억원

․ 연결통로 및 환승통로 토공 및 가시설 : 증) 8억원

․ 가설공 및 조경(수목제거, 가이식)     : 증) 3.4억원

소    계                           증) 3억원

○ 공사기간 조정현황(8차공사)

- 당  초 : 2012. 03. 06 ~ 2013. 01. 20

- 변  경 : 2012. 03. 06 ~ 2013. 02. 21(32일 연장)

※ 총괄분 : 변경사항 없음

- 연기사유

․ 환승통로 동선확보 방안 변경

․ 기존 지하철2호선 하부 작업공간 협소로 작업효율 저하

- 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부  1) 공문(공사기간 조정요청) 사본  1부.

2) 변경설계서  1부.

3) 준공기한 조정의뢰서  1부.  끝.