문서번호	정수시설과-9068
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代김오열	12/26 代안창수
협조	주무관		김은경
	주무관		윤지원

『영등포 1정수지 내부 방식공사』

사고이월 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

영등포아리수정수센터

『영등포 1정수지 내부 방식공사』

사고이월 보고

영등포 1정수지 내부 방식공사 시행중 다음과 같이 공사기간 변경으로 사고이월 사항이 발생되었기에 보고드림

공사 현황

공 사 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

공사개요

차 수	공 종	단 위	수 량	비고
1차수	내부 방식공사	㎡	7,375
2차수	내부 방식공사	㎡	8,078
계			15,453

총공사기간 : 2013. 09. 25 ~ 2015. 04. 30

(1차수 : 2013.09.25. ~ 2014.09.26, 2차수 2014.07.25. ~ 2015.04.30.)

총 도급액 : 1,016,484,150원 (1차수:462,308,000, 2차수:554,176,150원)

도 급 자  : (주)엘씨엠이엔지 대표자 박 미 애

관련 규정

지방공기업법 제 30조 1항 및 2항, 시행령 제 24조

지방재정법 제50조 1항 및 2항, 시행령 제 58조

사고이월 금액 : 239,840,150원

(단위 : 원)

계약차수	계약금액	기성금	사고이월금액	비고
2차 계약	554,176,150	314,3360,000	239,840,150

사고이월 사유

동절기 품질관리를 위한 공사중지(수질검사 소요기간 포함)에 따른 공사기간 연장

▶ 2차수 공사 기간 연장

- 당초 : ‘14. 7. 25 ~ ’14. 12. 18

- 변경 : ‘14. 7. 25 ~ ’15.  4. 30

▶ 동절기 품질관리를 위하여 현장 기온이 5℃ 이하인 경우 작업을 할 수 없는바,  ’14.12.16부터 ’15.4.12까지 공사기간 연장

- 공사 중지 : ’14. 12. 16

- 공사 재개 : ‘15.  4. 12

▶ 1차수 공사완료 후 수질검사에 소요된 기간(18일 소요)을 공사 연장 기간에 산입

- 4월 12일 + 18일 = 4월 30일(준공일)

조치 계획

위 내용과 같이 잔여공사비에 대하여 사고이월하여, 공사시행 및 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.