문서번호	수도자재관리센터-24700
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	계량기관리팀장	소장
조중엽	김흥식	12/29 성시영

대형 수도계량기 교체공사

차수준공에 따른 계약금액 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

수도자재관리센터

대형 수도계량기 교체공사 차수준공에 따른 계약금액 변경

대형 수도계량기 교체공사(장기계속단가계약) 계약건에 대하여 금차(제1차수) 준공기한이 도래됨에 따라 변경계약 후 준공처리 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 대형 수도계량기 교체공사-장기계속단가계약

□ 계약총금액 : 금638,888,000원(금육억삼천팔백팔십팔만팔천원)

○ 제1차수(2014.7.1~2014.12.31) : 금323,759,000원

○ 제2차수(2015.1.1~2015.06.31) : 금315,129,000원

□ 계약자(대표) : 솔바로건설(주)(한훈하)

□ 계약기간 : 2014.7.1 ~ 2014.12.31

□ 계약일자 : 2014.7.1

Ⅱ		금차(제1차) 변경내역

□ 당  초 : 금323,759,000원(금삼억이천삼백칠십오만구천원)

□ 변  경 : 금155,640,120원(금일억오천오백육십사만일백이십원)

[감  액 : 금168,118,880원(금일억육천팔백일십일만팔천팔백팔십원)]

□ 변경 사유

○ 대형 수도계량기 교체공사의 품목별 증 ․ 감 사항 발생

○ 2013년도에 계약한 고품질계량기 납품자에게 조작판넬을 설치토록 계약함에 따라 고품질계량기 설치부대 비용이 지출되지 않음.

Ⅲ		보고자 의견

□ 기 계약된 1년간의 계약총금액(금638,888,000원)은 변경하지 않고,

□ 금차수 준공시기가 도래됨에 따라 차수금액 변경계약 후 준공 처리

□ 금차 잔액분은 제2차(2015.1 ~ 2015.6)계약시 반영하고자 함.

첨  부 : 1) 대형 수도계량기 교체공사 기성총괄내역(제1차)  1부.

2) 합의서  1부.