문서번호	물재생계획과-911
결재일자	2013.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	하수관리팀장	물재생계획과장		물관리정책관
이원영	양병현	한유석		01/22 정만근
협 조	하수계획팀장		노우성
	하수정비팀장		천정남

2013 하수도 사업관리 용역 시행 보고

2013. 1

도시안전실

물재생계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구 하수담당부서	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『최적의 침수해소 방안 마련을 위한』

2013 하수도 사업관리용역 시행 보고

자치구 별로 제각각 이루어지던 하수도사업의 계획단계에서의 통합적 관리를 통해 최적의 사업추진을 도모하기 위한 하수도 사업관리용역 시행 보고임

추진배경

○ 하수도 사업은 자치구에 전적으로 의존하여 이루어지는 실정으로, 종합적인 계획수립 및 예산반영을 하는 우리시에서 사업관리에 어려움이 있음

○ 자치구는 인력부족 및 전문성 부족으로 긴급상황 발생시 수리검토의 어려움 및 최적의 사업계획수립의 어려움으로 예산확정 후 사업계획 변경사례 다수 발생

○ 또한 자치구는 하수도사업을 시행함에 있어 실시설계 위주의 설계로 정확한 침수원인 분석 및 최적의 대책마련에 대한 검토 미흡

○ ‘12년 주요 사업에 대한 검토 등으로 효율적인 하수관거정비 성과가 있어 자치구 사업의 통합관리를 위해 지속적인 사업시행 필요

‘12년도 용역 개요 및 추진실적

○ 용역개요

□ 용 역 비 : 168,458천원

□ 용역기간 : 2013. 3.12 ~ 2013. 1.31

□ 용 역 사 : 에이스톤엔지니어링(주)

○ 추진실적

□ ‘12년 주요사업 하수관거정비사업 적정성 재검토

- ‘12년 시행중에 있는 주요 계속사업에 대한 하수관거 정비사업의 방향성 재검토 및 최적 대안제시를 통해 사업의 효율성 극대화

(학여울역~대치우성아파트사거리간 침수방지공사 외 4건)

□ ‘13년 하수관거정비사업 타당성분석 및 수리검토

- 효율적인 ‘13년 하수관거정비사업 시행을 위해 사전수요조사시 신청된 하수관거사업에 대한 침수원인분석 및 수리검토 등을 통한 우선순위를 파악으로 사업의 타당성 검토(하수관거 신설개량 75건 1,756억원, 하수관거보수보강 53건 677억원)

□ 비관리청 하수관거 업무협의 수리검토

- 광화문 C자형 관거 및 홍대 공항철도 유로변경 등 비관리청 공공하수도 저촉에 따른 공공하수관로변경 자문제 시행시 공공하수도 저촉관련 수리검토 시행 등

□ 기타 주요사업 기술자문 및 자치구 하수업무 관련 직원 전문교육

- 주요 침수취약지역 수리검토 등에 따른 기술자문 및 자치구 직원 하수도 설계기법 교육

○ 추진효과

□ 예산배정전 수리검토 시행으로 최적의 사업계획 수립

- 수리검토 미흡한 예산요청사업 재검토

□ 자치구에 의존하던 사업추진 ⇒ 서울시 주도의 사업추진

- 하수도사업관리용역을 통한 『사전설계검토제』,『공공하수관로변경자문제』 추진

※ 사전설계검토 128건 완료, 사업계획조정 71건

⇒ 예산절감 효과 : 과업수행) 일반용역 수행시 710백만원

사전설계검토) 133,600백만원(243,300백만원 신청분 조정 결과)

‘13년 추진방향

○ 대상사업 확대 : 단위개량사업 ⇒ 단위개량사업 + 종합정비사업

○ 과업내용 추가 : 하수도정비사업과 연계한 빗물침투시설 설치 검토

○ 자치구 기술교육 강화를 통한 업무능력 증대

‘13년 추진계획

○ 용역개요

□ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2014. 1.31

□ 입찰방법 : 사업수행능력평가후 가격입찰

□ 입찰자격

- 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제33조 규정에 의거 공고일 현재 지식경제부에 건설부문(상하수도,수자원개발,구조,토질‧지질)분야의 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고, 해당분야별 기술사를 보유한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설부문(상하수도,수자원개발.토목구조, 토질및기초) 전문분야의 기술사사무소를 개설 등록한 업체로서

- 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 제44조의 규정에 의거 국토해양부에 일반측량업 또는 공공측량업으로 등록을 필한 업체

- 상기 사항을 모두 갖춘 업체는 단독 또는 면허보완을 위해 공동도급(공동이행방식)이 가능하며, 서울시에 주된 영업소가 있는 업체와 공동도급으로 참여시 「지방자치단체입찰시 낙찰자결정기준(행안부예규 제438호,‘12.12.24)에 의거 지역업체 참여도점수부여(단, 공동수급업체는 대표자를 포함하여 2개사로 함)

○ 주요 과업내용

□ 자치구 2013년도 시행 하수도정비사업에 대한 기본설계 수준의 검토

※ “사전설계검토제” 운영시 실질적인 수리해석, 대안비교 검토

- 신설,개량사업(64건, 32㎞) : 침수원인 분석 및 침수방지 계획, 사업여건 변화 검토

‧ 설계 3건, 설계+공사 8건, 공사 53건

‧ 신규사업 42건 / 계속사업 22건

- 종합정비사업(26건, 95㎞) : 설계 여건변화 발생시 추가 검토

‧ 설계 1건, 설계+공사 3건, 공사 22건

‧ 신규사업 4건, 계속사업 22건

□ 2014년도 신규 하수도 단위사업 타당성 검토(약32㎞,10,000백만원)

□ 침수피해 등 긴급상황 발생시 하수관거 개량계획 수립

- 정확하고 신속한 현장조사 및 수리해석을 통한 원인분석

- 펌프장, 저류조 등과 연계한 종합적 장․단기 대책 계획수립

□ “공공하수관로 변경자문제” 운영에 대한 수리검토

- 설계내용에 대한 적정성 검토 및 기술적인 대안 제시 등

□ 하수도사업과 연계한 빗물침투시설 설치 기술검토

- 빗물침투시설 침투능에 대한 세부검토 및 침투능 검사기준, 유지관리기준 마련

- 하수관거정비사업시 빗물침투시설 적용방안 및 설치매뉴얼 작성

- 기반영 빗물침투시설 등에 대한 효과분석 및 모니터링 시행

□ 자치구 직원에 대한 주요정책변화 및 하수도설계, 공사품질 등 기술교육

□ 정기검토보고서 작성 및 하수도정비 백서 발간

- 중간검토 보고서 1회 /  하수도정비백서 발간 : 2014.1월중

용역비 산정개요

○ 소요 용역비 : 400백만원

○ 산출내역

□ 계획수립 : 인건비 616인/년 × 518,495원 = 319,393천원

□ 현장조사 및 측량, DB구축비 : L=4.8㎞ × 8,852천원 = 42,492천원

□ 정기보고서 및 연보 등 1식 × 2,800천원 = 2,800천원

□ 제경비(부가세) 등 1식 × 253,371천원 = 35,315천원

기대효과

○ 통합적 설계관리 체제 운영으로 하수도설계수준 향상의 기틀 마련 및 정착

○ 침수 및 재난상황 발생시 신속한 현장조사 및 수리해석으로 최적의 사업계획수립을 통한 도시안전 확보

○ 설계부터 시공까지 자치구에 의존했던 기존 하수도사업 추진체계의 변화를 통해 효율적 업무추진 및 예산낭비 방지

○ 신속하고 전문적인 하수도 기술검토를 통한 하수도품질 업그레이드

○ 자치구 인력 기술력 향상 및 사업완료후 효과분석 등 피드백 가능

○ 하수도사업과 연계한 빗물침투시설 전면시행 기틀 마련

향후계획

○ 2013. 01 : 기술용역타당성 심사, 용역발주심의 의뢰

○ 2013. 01 : 용역발주

○ 2013. 02 : 용역계약 및 착공