투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약(분뇨처리시설 유입저류조 증설공사) 의뢰

1. 슬러지재활용과-8013(‘14.12.29)호 “동절기 공사중지(분뇨 유입저류조 증설공사) 시행”과 관련입니다.

2. 위 호와 관련『분뇨처리시설 유입저류조 증설공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사  유 :

- 현공정이 터파기를 진행하고 있고 구조물작업을 하여야 하는 바 지반이 얼어 공사진행이 곤란함.

- 구조물 공사시 평균온도 5℃이하여서 콘크리트 타설 및 양생 불가함

- 동절기 평균기온이 -5℃이하여서 작업자들의 체감온도 저하로 인한

안전사고 우려.

나. 공사중지 기간 : 2014.12.25. ~ 2015.02.28.

다. 계약변경 : 계약기간

• 변경전 :  ‘14.10.07~ ’15.03.05

• 변경후 :  ‘14.10.07~ ’15.06.15

라. 계약업체 : ㈜보훈종합건설 외 1

첨부 : 계약변경 관련서류 각 1부. 끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	12/29 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-8029	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개