문서번호	토목부-25868
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		최광무	12/29 노우성
협조

폐기물처리용역 설계변경(전체2회, 제3차2회) 보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2014.12.

서울특별시도시기반시설본부

(토  목  부)

폐기물처리용역 설계변경(전체2회, 제3차2회) 보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』에서 추가 발생 및 설계도서 검토 결과 누락된 건설폐기물에 대하여 설계변경에 반영하고자 보고하는 내용임.

□ 용역개요

◦ 용 역 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 폐기물처리용역

◦ 용역기간 : ′10.12. 7 ~ ′15.12.30 (3차 : ′13.10. 8 ~ ′15. 2.28)

◦ 용역금액 : 283,052천원 (3차 : 159,214천원)

◦ 용역업체 : ㈜해남건업, ㈜한진산업, 이윤산업

□ 보고내용

◦ 본 공사시 추가 발생된 건설폐기물 반영(전체) 및 실제 반출 예정 물량(제3차)에 대하여 설계에 반영이 필요한 실정임.

- 기존 수로 터파기 구간에 폐아스콘 반영

- 설계도서 검토 결과 반영(현장유용 폐기물→폐기물처리 반영) 등

□ 설계변경 내역 (전체2회, 제3차2회)

◦ 용역비 및 용역기간

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
전체	용 역 비	283,052,000	404,820,000	121,768,000	내역변경
	용역기간	′10.12. 7~′15.12.30	′10.12. 7~′15.12.30	-
3차	용 역 비	159,214,000	42,410,000	감)116,804,000	내역변경
	용역기간	′13.10. 8~′15. 2.28	′13.10. 8~′15. 2.28	-

◦ 폐기물 수량 내역

(단위 : 톤)

공 종		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
전 체	폐콘크리트	3,568	9,064	5,496
	폐아 스 콘	1,034	1,640	606
	혼합폐기물	1,343	1,343	-
	임목폐기물	2,112	2,112	-
제3차	폐콘크리트	2,756.08	900	감)1,856.08
	폐아 스 콘	1,034	300	감)734
	혼합폐기물	191.61	191.61	-
	임목폐기물	1,856.83	67.94	감)1,788.89

□ 조치계획

◦ 상기와 같이 시설공사에서 추가 발생, 설계도서 검토 결과 누락된 건설폐기물 반영(전체) 및 실제 폐기물처리 예정 물량(3차)에 의거 설계변경을 시행하여 사업 추진에 철저를 기하고자 합니다.

첨부 : 1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체2회, 제3차2회) 각1부.

3. 보고서 2부.  끝.