문서번호	건설총괄부-1345
결재일자	2013.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건설총괄부장	시설국장		도시기반시설본부장
조선휘	이비오	이광세		01/23 조성일
협 조
	건설정보관리과장		이동훈

건설사업관리정보시스템(One-PMIS)

시스템 운영 평가 계획

2013. 1.

도시기반시설본부

(건설총괄부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

One-PMIS 운영 평가계획

통합사업관리정보시스템(One-PMIS)의 내실있는 운영과 체계적인 관리를 위한 제3차(2012년도 결산) 시스템 운영 평가계획 보고임

※ 추진배경 : 시장방침 제207호('12. 6.14) 및 건설총괄부-17006('12. 7. 6)

Ⅰ	추 진 경 위

1. 제1~2차 평가결과 및 분석

구분	1차 평가	2차 평가	결과 분석
사업(건)	101	97	현장 감소 4개현장
대상기간	2012. 7. 19 ~ 7. 25	2012. 9. 3 ~ 9. 12	-
결과보고	'12. 7. 27	'12. 9. 14	-
공사개요	14% 미입력	2% 미입력	공개정보 신뢰도 향상
공정보고	34% 미보고	16% 미보고	공정관리 활용도 향상
공종관리	40% 공종10개 미만관리	34% 공종10개 미만관리	관리도 향상
웹카메라	12% 미접속	10% 미접속	실시간 현장공개 향상
특이사항	-	미흡현장 방문점검	-

2. 분석결과에 대한 문제점 및 조치계획

시스템활용 미흡 현장에 대한 조치강화 필요

❍ 착공1개월 이내, 보상 중, 공사 중지 현장의 시스템 활용도 미흡

⇒ 미흡현장 중심으로 방문 지도점검 및 교육 강화

❍ 일부 부서장(기관)의 시스템 활용도․관심도 저조

⇒ 각 부서장 및 주무과장의 시스템 접속실적 건수를 평가에 반영

⇒ 각 부서별 시행 사업건수에 대한 보정 필요(가중점 부여)

사용자 Needs를 반영한 업무경감 및 시스템 활용성 강화

❍ 사용자 중심의 편리하고 과학적인 시스템으로 지속 발전

❍ 체계적 관리와 내실 있는 운영을 위해 평가결과 상시공개

❍ 신규 담당자를 위한 One-PMIS 집합 및 사이버 교육 지속 추진

Ⅱ	제 3차 평가계획 (2012년 결산)

1. 평가개요

평가대상 : 63개 사업 (별첨)

※ 2013년 현재 도시기반시설본부에서 진행중인 사업

평가기간 : '13.1.7 ~ '13.1.31

❍ 제 3차 평가(2012년 최종 결산) 대상기간 : '12.10.1~12.31

※ 평가 기준일 : '12.12.31 (공정보고 마감일 : '13. 1. 3)

- 평가공개 및 이의신청 : '13. 1. 28 ~'13. 1. 31

- 결과보고 : '13. 2  8(금) 간부회의시

2. 평가방향

부서별 평가항목

❍ 활용실적 : One-PMIS & 행정정보와 연계한 문서작성 건수(상대평가)

❍ 부진사업 : 공정율이 계획 대비 실적 90%미만 부진사업

❍ 부서관심도 : 부서장 접속 실적 등 관심도평가

계약자 평가 (시공사․감리사)

❍ 1,2차평가 : 결과 누적 평가

❍ 공사 개요 : 알림이 공개자료 체크 (기시행 점검표 참조)

❍ 공정 보고 : 공정 진척보고 (2012.12.31 보고여부)

❍ 웹 카메라 : 설치의무 현장에서 점검기간 동안 미작동 카메라가 있을 경우 최하점수 평가

※ 웹카메라 미설치 현장 공정진척 보고에 가산 평가

❍ 공종 분할갯수 : 액티비티(공종) 관리 평가

3. 평가항목 및 배점

부서별 평가 부문

평가항목	평가비중	평 가 개 요
활용 실적	40%	- '행정정보연계 문서실적'부서별 평가 - 공사관련자료 시스템내 보관여부 검토
부진 사업	50%	- 90%미만 부진공정 조치 평가
부서관심도	10%	- 부서장 등 사용자 접속 실적 평가

계약자별 평가 부문

평가항목	평가비중	평 가 개 요
1,2차 평가 반 영	20%	- 1,2차 평가내용 반영
공사 개요	20%	- 공사개요 입력자료 오류 평가 (건설알림이 공개자료 체크 여부)
공정 보고	20%	- 건설알림이 공개 '공정진척보고' 누락건수 평가
웹 카메라	20%	- 웹카메라 설치현장에 대한 웹카메라 고장 건수 평가 - 웹카메라 미설치 현장 공정보고 합산
공정 개정	20%	- 공종(엑티비티)관리 충실도 평가

평가항목 배점표

❍ 부서별 평가

구 분	항 목	배점	등 급				비 고
			탁월	우 수	보 통	미 흡
부서별 (10점)	사업별 평균 활용실적 (행정정보연계건수)	4점	4.0	3.8	3.6	3.4
			(91~120건)	(61~90건)	(31~60건)	(0~30건)
	부진사업 비율 (공정율 90%미만)	5점	5.0	4.7	4.4	4.1
			(0~25%)	(26~50%)	(51~75%)	(76~100%)
	부서장 관심도 (시스템 접속횟수)	1점	1.0	0.9	0.8	0.7
			(30회이상)	(21~30회)	(11~20회)	(0~10회)

※ 부서별 평가는 사업 건수의 경중을 감안하여 건수비례 가중치 부여(1~4%)

사업건수	1~5건	6~10건	11~15건	16~20건 이상	20건 이상
가 중 점	0%	1%	2%	3%	4%

❍ 계약자 평가

구 분	항 목	배 점	등 급			비 고
			우 수	보 통	미 흡
계약자별 (10점)	1차평가	1점	1.0	0.9	0.8
	2차평가	1점	1.0	0.9	0.8
	공사 개요	2점	2.0	1.8	1.6
	공정 보고	2점	2.0	1.8	1.6
	웹 카메라	2점	2.0	1.8	1.6
	공정 개정	2점	2.0	1.8	1.6

4. 향후 추진일정

평가결과 발표 : '13. 2. 8 (2월 둘째주 간부회의시)

❍ 평가결과 우수사례․우수부서 위주로 보고 및 격려

❍ 미흡현장 및 부서는 개별적 비노출 지도점검 시행 (별도통보)

개선 요구 사항은 2013년 유지보수사업에 포함시행(5월까지)

4차 평가 실시 : '13. 4월중

※ 우리본부(안전과) 안전점검 평가결과와 종합하여 시공사․감리사 및 우수부서 선발, 시장표창 등 인센티브 지급

Ⅲ	부서별 협조사항

계약자 입력사항 등 정비철저

❍ 시스템 접속 평가 : 부서장 및 주무과장 접속실적 평가 유의

❍ 웹카메라 정비 철저

❍ 미흡현장에 대한 지도점검시 현장 협조

One-PMIS 계약자시스템에 하도급업체 참여현황 등록철저

❍ 공사실명제 및 이력제 확대시행을 위한 하도급업체 등록 강화

❍ 제4차 평가시 하도급업체 및 참여기술자 등록내용 평가반영 예정

- 하도급업체명, 대표자, 현장소장, 참여기술자 등

평가결과 공개 및 이의신청 제출

❍ 평가 점수에 대한 이의신청 접수기간 : '13. 1. 28 ~ 1. 31

붙임  1. 평가 대상사업 목록 1부.

2. 2012년 4/4분기 One-PMIS 운평평가 방법 1부.

3. 기관(부서)별 평가 총괄표 1부.

4. 단위사업별 평가 총괄표 1부.

5. 사업별 자체 점검표(기배부) 1 부.

6. 1,2차 평가 결과 1 부.  끝.