문서번호	운영1과-311
결재일자	2013.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영1과장	데이터센터소장		정보화기획단장
김진석	김현규	이계헌		01/23 황종성
협 조	기획관리과장		김학영
	운영2과장		김진하

2013년 정보자원 통합인프라 구축 기본계획

2013.  1.

정보화기획단

(데이터센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「2013년 정보자원 통합인프라 구축」 기본계획

서울시 전체 정보화 사업 중 IT 정보 자원에 대한 통합 인프라 구축을 추진하여 저전력 · 고효율의 그린IT를 구현하고 효율적인 정보서비스 기반을 마련하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 정보자원 통합 및 인프라 구축 개선계획(운영1과-2569, '08. 8.11)

□ 2013년도 정보화사업 예산타당성 심사결과(정보화기획담당관-12316, '12.9.5)

Ⅱ		추진방향

□ 저전력, 고효율의 친환경적인 IT인프라 구축

□ 정보자원 공동활용, 자원운영 확장성 확보 등 IT자원관리 효율성 제고

□ 업무부서 정보화사업 일정에 따라 통합인프라 구축 조기발주 추진

□ 서비스 이관 지원을 통한 신뢰받는 정보서비스 기반 구축

Ⅲ		사업개요

□ 사업기간 : 2013. 1 ～ 12

□ 사 업 비 : 5,576백만원

□ 사업대상 : 서울시 17개 부서 24개 사업 IT인프라 통합구축

□ 추진방법 : 업무부서 IT인프라 예산 재배정 및 업무분야별 통합 추진

❍ 서울시 각 부서 정보화 사업을 별도 정보화사업비 실링(Ceiling) 없이 실 ․ 국 ․ 본부 사업비 내에 예산 편성(예산담당관-7385, '12.7.26)

❍ 각 업무부서 정보화사업 중 데이터센터에 설치 운영될 IT인프라 부분 예산 재배정을 통해 효율적인 시스템 통합발주 추진

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에의한계약, 적격심사 등)

Ⅳ		추진계획

□ 추진내용

❍ 업무부서 IT인프라 예산 재배정

- 정보자원 공동활용을 위해 데이터센터 내에 설치하게 될 업무부서 IT인프라 부분 예산 재배정 추진

- 데이터센터 정보자원 인프라 구축 예산과 업무부서 IT인프라 예산을 활용하여 서비스 분야별 통합구축

❍ 서비스 분야별 분리 ․ 통합 구축 추진

- 데이터센터 조직 구성 체계와 같이 내부행정 ․ 민원행정 ․ 프론트오피스 등 담당 서비스 분야별 통합 구축

- 백오피스 및 프론트오피스 보강 사업을 관련분야 자원통합 구축 사업과 통합발주 추진하여 업무 효율성 증대

❍ 서비스 분야별 통합대상 (전체 17개 부서 24개 사업 IT인프라 통합구축)

- 내부행정시스템 자원통합  : 결재문서공개시스템 등 8개부서 14개사업

- 민원행정시스템 자원통합  : 승용차요일제시스템 교체 등 3개부서 4개사업

- 프론트오피스시스템 자원통합 : 열린데이터광장 등 6개부서 6개사업

❍ 분야별 통합구축 사업예산 (총 5,576백만원)

- 내부행정시스템 자원통합     : 4,498백만원

- 민원행정시스템 자원통합    :   367백만원

- 프론트오피스시스템 자원통합 :   711백만원

사 업 명			사업비		사 업 명	사업비
총 5,576백만원					총 5,576백만원
(데이터센터) 정보자원통합인프라구축 확보 예산	내부행정시스템 자원통합 (2개부서 8개사업)		1,852		내부행정시스템 자원통합 (8개부서 14개사업 자원통합) ※ 백오피스 시스템 보강 사업과 통합 발주	4,498
	민원행정시스템 자원통합 (1개부서 1개사업)		90
	프론트오피스 자원통합 (2개부서 2개사업)		119
	소 계		2,061
(업무부서) 분야별 IT 인프라 통합 구축 대상 사업 (재배정 대상)	내부행정시스템 분야 (6개부서 6개사업)		2,212		민원행정시스템 자원통합 (3개부서 4개사업 자원통합)	367
	민원행정시스템 분야 (2개부서 3개사업)		277
	프론트오피스 분야 (4개부서 4개사업)		248
	소 계		2,737
					프론트오피스 자원통합 (6개부서 6개사업 자원통합) ※ 프론트오피스 시스템 보강 사업과 통합 발주	711
백오피스 시스템보강	통합 스토리지 증설		297
	통합 백업장비 도입		137
	소 계		434
프론트오피스 시스템보강	통합 DB서버 교체		344

※ 업무부서 추진일정 등에 따라 재배정 금액 다소 변동 가능

□ 단위사업별 세부 사업내용

내부행정시스템 자원통합

❍ 사업내용

- 결재문서공개시스템 구축등 8개부서 14개사업 자원통합 구축

· 유닉스 통합서버 4대 신규 구매 : 16파티션

· 윈도우/리눅스서버 7대 : 가상서버 2대, 윈도우서버 3대, 리눅스서버 2대

· 스토리지 증설 : 통합기록관리 150TB, 업무관리 22TB

· 신규 스토리지 2대 : 데이터공유 30TB, 가상화용스토리지 30TB

· 데이터베이스 : MS-SQL 1본, 오라클DBMS 1본

- 백오피스 시스템 보강 : 통합 백업장비 및 스토리지 증설

❍ 통합 추진전략

- 노후화된 Unix서버는 고성능 저전력 통합서버를 구매하고 파티션을 구성하여 자원 재배치가 가능한 유연한 시스템 구축

- 결재문서 공개 및 행정데이터통합 등 윈도우/리눅스 서버는 통합가상화 서버에 탑재하여 자원 공동활용 극대화

- 데이터베이스 및 백업S/W, 스토리지 등 기존 구성의 추가·보완 등을 통해 시스템 안정성 확보

민원행정시스템 자원통합

❍ 사업내용

- 포장도로관리시스템 등 3개부서 4개 사업 자원통합 구축

· 유닉스 서버 1대 : 승용차요일제 RFID 1대

· 윈도우/리눅스서버 5대 : 윈도우 서버 항공 1대, 도로 3대, 승용차 1대

· 신규 스토리지 1대 : 항공사진관리 30TB

❍ 통합 추진전략

- 가상화서버로 통합 가능한 업무용 서버와 개별 구축이 필요한 서버를 분리 구축함으로써 업무 특성에 맞는 유연한 구성으로 업무 효율 극대화

- 유닉스 노후 서버 교체로 안정성 확보

- DBMS, 백업 S/W 등 기존 시스템 공동 활용 검토 및 부족분 추가 구매를 통한 시스템 안정성 확보

프론트오피스시스템 자원통합

❍ 사업내용

- 열린데이터 광장 활성화 등 6개부서 6개사업 자원통합 구축

· 가상화 및 블레이드 서버 10식 : 열린데이터 광장 활성화(3), U-지식여행(1),              u스마트장애프리존(1), 어르신전문포털(4), 포장도로관리(1)

· 스토리지 증설 1식 : 열린데이터 광장 활성화(1)

· L4스위치 2식 : 유비쿼터스 모바일 전자정부 구현(1), 어르신전문포털(1)

· 소프트웨어 : 오라클 DBMS(2본) 및 윈도우 서버 라이센스

- 프론트오피스 시스템 보강 : 통합 DB서버 교체

❍ 통합 추진전략

- 가상화 및 블레이드서버 구매를 통하여 필요시 시스템자원 구성, 재배치가

가능한 유연한 시스템 구축

- DBMS 및 백업S/W, 스토리지 등 기존 시스템과의 호환성을 확보를 통해

시스템 안정성 확보

□ 추진체계

구 분		추진부서	담 당 업 무	비고
백오피스 자원통합	내부행정시스템 자원통합	운영1과 (김진석)	- 통합인프라 구축 기본계획 수립 - 내부행정 분야 통합인프라 구축 사업추진 - 내부행정 분야 업무부서 AP 입주 및 이관 지원
	민원행정시스템 자원통합	운영1과 (박종순)	- 민원행정 분야 통합인프라 구축 사업추진- 민원행정 분야 업무부서 AP 입주 및 이관 지원
프론트오피스 자원통합		운영2과 (전성권)	- 프론트오피스 통합인프라 구축 추진계획 수립 시행 - 프론트오피스 분야 업무부서 AP 입주 및 이관 지원

Ⅳ		추진일정

□ 시스템 설계 및 예산 재배정	: 2013. 1. ~ 2.
□ 세부 추진계획 수립 및 계약 심사	: 2013. 2. ~ 3.
□ 사업발주 및 계약	: 2013. 3. ~ 4.
□ 시스템 구축	: 2013. 4. ~ 8.
□ 사업부서 AP 입주 및 이관 지원	: 2013. 6. ～ 12.

Ⅴ		기대효과

□ 정보자원 통합으로 자원도입 비용 등 예산 절감

❍ 중복투자 방지, 자원 공동활용 등 장기적으로 자원도입 비용절감

❍ 상면적, 전기, 공조 및 유지보수 등 데이터센터 운영비용 절감

□ 정보자원 관리의 효율성 및 안정성 강화

❍ 확장 가능한 통합서버 환경 구축으로 유연한 자원 재분배 등 효율성 증대

❍ 중요 정보보호 등을 위해 시스템 이중화 구성 및 보안 강화를 통해 보다 안정적인 운영기반 확보

Ⅵ		행정사항

□ 데이터센터

❍ 서버, 스토리지, 백업장비 등 시스템 구성 설계 및 통합 구축

❍ IT 인프라 통합 운영관리 및 유지보수

❍ 기타 업무부서 AP 입주 및 이관 지원

□ 업무부서 (IT인프라 통합대상) : 붙임 1 참조

❍ H/W 통합 예산 재배정

❍ 데이터센터 사업자 선정후 서버 규모에 적정한 상용 S/W도입 및 AP개발(또는 이관) 등 정보화 사업 수행

❍ 서비스 운영 및 상용 S/W 유지관리

붙임.  1. '13년 업무부서 통합인프라 구축 대상사업 (재배정 대상) 1부.

2. '13년 정보자원 통합인프라 구축사업 (데이터센터 확보예산) 1부.

끝.

작 성 자	데이터센터 소장 : 이계헌 ☎3470-1300, 운영1과장 : 김현규 ☎1420, 담당 : 김진석 ☎1451

[붙임 1]

'13년 업무부서 통합인프라 구축 대상사업 (재배정 대상)

[재배정 대상사업 예산 총액 : 2,737,237천원]

□ 내부행정시스템 자원통합                                     (천원)

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	사진관리시스템 서버 교체	대변인	언론담당관	142,378	UNIX서버 1대	스토리지 증설 요청 (연 1.2TB)
2	지식관리시스템(구 상상뱅크) 구축 및 운영	서울혁신 기획관	사회혁신담당관	260,250	UNIX서버 1대 스토리지 3TB
3	통합기록관리시스템 스토리지 구매(증설)	행정국	정보공개정책과	1,349,133	스토리지 150TB 증설
4	시설공사 준공도면 전산통합관리	재무국	재무과	120,000	스토리지 10TB	도시기반시설본부
5	업무관리시스템 서버자원 증설	소방재난본부	안전지원과	200,000	기존서버 증설 스토리지 증설
6	업무관리시스템 서버자원 증설	상수도사업본부	전산정보과	140,000		특별회계
총 계				2,211,761

□ 민원행정시스템 자원통합

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	승용차요일제 RFID시스템 메인서버 교체	기후환경본부	친환경교통과	134,523	UNIX서버 1대	윈도우서버 1식 요청
2	도로정보 정보화전략계획(ISP) 수립	도시안전실	도로관리과	44,000	윈도우 서버 1대
3	2013 포장도로관리시스템 성능개선 사업	도시안전실	도로관리과	98,600	윈도우 서버 2대
총 계				277,123

※ 세무종합시스템 교체사업은 규모가 큰 단일사업으로 통합구축에 따른 실익이 적고 통합구축과 세무업무 추진일정이 상이함에 따라 예산 재배정 없이 해당부서 자체 추진

□ 프론트오피스시스템 자원통합

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	유비쿼터스 기반 모바일 전자정부 구현	정보화기획단	정보화기획담당관	20,196	L4 Switch PAS5016 1개, GBIC(for PAS) 4개
2	어르신 전문포털(일감뱅크) 구축	복지건강실	어르신복지과	193,600	서버 : 블레이드(4식) L4스위치 : Alteon 3408(1식) DB : Oracle Std(2본)
3	2013 포장도로관리시스템 성능개선 사업	도시안전실	도로관리과	17,300	4Core, M/M(16GB), HDD(300GB *2EA), OS(Win2008, CAL *5)
4	u-지식여행 서버 확충 및 시스템 보강	인재개발원	인재기획과	17,257	4Core, M/M(4GB), HDD(300GB * 2EA)
총 계				248,353

[별첨 2]

'13년 정보자원 통합인프라 구축 대상사업

[데이터센터 확보예산 총액 : 2,061,320천원]

□ 내부행정시스템 자원통합                                     (천원)

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	결재문서공개시스템 구축	행정국	정보공개정책과	400,000	윈도우서버 1식 UNIX서버 1식
2	통계정보시스템 노후서버 교체			184,932	DB 서버 1식 웹서버 1식 스토리지 증설
3	행정포털 운영 및 유지보수	정보화기획단	정보시스템담당관	17,985	윈도우서버 2식
4	행정정보시스템 운영 및 유지보수			550,203	UNIX서버 2식
5	서울형 업무관리시스템 고도화 및 확산			297,000	UNIX서버 증설 가상화장비 증설
6	행정데이터 통합 및 열린 데이터 광장 활성화			99,000	스토리지 증설 서버 2식
7	데이터 공유 활용 기반 조성			213,400	DB서버 1식 DBMS구매 스토리지 증설
8	전자문서 로그분석시스템 구축			90,000	UNIX서버 1식 스토리지 증설
총 계				1,852,520

□ 민원행정시스템 자원통합

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	항공사진 통합관리 서비스	정보화기획단	공간정보담당관	90,000	스토리지 30TB	윈도우서버 1식 요청
총 계				90,000

□ 프론트오피스시스템 자원통합

연번	사업명	실국	부서	예산액	요구규격	비고
1	행정데이터 통합 및 열린데이터 광장 활성화	정보화기획단	정보시스템담당관	103,950	2cpu(8Core), M/M(12GB), HDD(300GB * 4EA) 스토리지 : 10TB 증설
2	u스마트장애프리존 확대 사업		공간정보담당관	14,850	Dual Core(2Ghz) M/M(8GB), HDD(146GB * 2EA)
총 계				118,800