문서번호	도시철도설비부-12099
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박원모		서태창	12/29 정찬웅
협 조

『지하철 9호선 916공구 건설공사(전기)』 설계변경(전기분야) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

『지하철 9호선 916공구 건설공사(전기)』 설계변경(제1회) 검토보고

지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사(전기) 설계변경(제1차)요청이 감리단으로 부터 있어 이에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사

❍ 사업기간 : 2008.6.2. ~ 2014.12.31

❍ 총공사비 : 152,602백만원

❍ 시 공 사 : 현대산업개발(주)외 2개사

❍ 감 리 사 : ㈜유신 [전기:(주)엠에스제이텍]

Ⅱ		관련근거

❍  서지916전 14-281(2014.12.29.)호 「916공구 정거장 전기공사 9차분 설계변경 요청」

Ⅲ		설계변경 내용

❍ 사업비변경(전기)                                                                                                      단위:원

구 분		공사금액			계약기간
		당 초	변 경	증 감
총공사비		5,183,900,000	6,032,083,000	증848,183,000
차수	7차	41,662,000	41,662,000	-	기 준공
	8차	4,897,554,000	4,897,554,000	-	기 준공
	9차	244,684,000	1,092,867,000	848,183,000	14.09.19～14.12.31

❍ 주요설계 변경내용

번호	설계변경 내용	증. 감액(원)	비고
1	저압 간선케이블을 BUS-DUCT로 변경	48,472,466
2	에너지관리장치 설치	250,356,957
3	UPS 용량 변경	-56,871,550
4	LED 조명기구 변경	207,240,584
5	승강설비 소방접점 신설	32,959,032
6	소방바닥 유도등회로 분리변경	43,455,141
7	승강장 PSD 구간 터널조명 설치	36,079,093
8	정거장 수익시설 확충에 따른 전력간선 공사 추가	67,069,865
9	928정거장 에스컬레이터 추가에 따른 전력 간선 공사추가	38,103,876
계		666,865,444

Ⅳ		조치계획

❍ 전기분야 설계변경 내용을 관련부서인 도시철도계획부,도시철도토목부에 통보

❍ 지하철 9호선 2단계 916공구 감리단에 설계변경 내용을 통보하고자 함

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 916공구 전기공사 9차분 설계변경 요청서 1부. 끝.