문서번호	건축부-673
결재일자	2013.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	문화시설과장	건축부장		시설국장
이형재	정진수	안재혁		01/23 이광세
협 조
	건축설비과장		조예환
	주무관		배수웅
	주무관		조대복
	주무관		강종희
	주무관		임병길

『서남권돔야구장 건립공사 전면책임감리용역』

총차 계약변경 및 7차분 계약시행 보고

2013. 01

도시기반시설본부

(건축부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역」

총차 계약변경 및 7차분 계약시행 보고

「서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역」과 관련하여 총차 계약변경 및 7차분 감리계약 시행방안에 대한 보고임

□ 용역개요

○ 용  역  명 : 서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역

○ 총용역기간 : 2008. 12. 30 ~ 2013. 01. 25 (6차 : 2012.08.05 ~ 2013.01.25)

○ 총계약금액 : 3,795,000천원

○ 계  약  자 : (주)선엔지니어링건축사사무소 외 2개사

□ 추진경위

○ 2012. 8. 01 : 총차 계약변경 및 6차분 감리용역계약 시행

○ 2012.12. 26 : 공사계약기간 조정 보고(준공기한 당초 ‘12.12.31→ 변경 ’13.12.31)

○ 2013. 1. 22 : 감리용역계약 요청 (선종합2013-77)

□ 총차 계약변경 및 7차분 발주                                (단위:천원)

구분		당초	변경	증감	비 고
용역기간	총차	2008. 12. 30 ~ 2013. 01. 25	2008. 12. 30 ~ 2014. 01. 31	371일 연장
	기준공	2008. 12. 30 ~2012. 08. 04		-
	6차	2012. 08. 05 ~ 2013. 01. 25		-	준공예정
	7차	2013. 01. 26 ~ 2014. 01. 31		371일 연장	금차발주
계약금액	총차	3,795,000	5,348,500	1,553,500 증
	기준공	3,595,000		-
	6차	200,000		-	준공예정
	7차	1,553,500		-	금차 발주

□ 검토 사항

○ 총차 공사계약 기간을 당초 ‘12.12.31에서 ’13.12.31으로 변경계약함에 따라 공사기간에 맞추어 감리용역기간 연장(준공후 사후관리를 1개월로 하되 최소인원 배치).

○ 건설공사 감리대가기준(국토해양부 고시 제2012 - 922호)에 따른 총감리원수를 배치하되 기 계약된 감리원의 기존 노임단가를 적용하여 대가 산출함.

○ 6차 감리용역비는 563,500천원이었으나 ‘2012년 감리비 예산(200,000천원) 부족으로 선투입된 감리비(363,500천원) 정산 필요

※ 6차 감리용역비는 598,000천원으로 방침 수립하였으나 당초 예정된 토목감리원을 미투입  함에 따라 563,500천원으로 조정함

○ 7차 감리용역비 1,190,000천원과 6차 정산금액 363,500천원의 합계 금액 1,553,500천원을 반영하여 계약코자 함

※ 수익시설 및 지하2층 주차장 공사 설계변경 후 잔여 공사기간의 50%만큼 전기감리원(초급)을 추가배치 예정(전력기술관리법 운영요령, 지식경제부 고시 제2012-283호)

□ 처리 의견

○ 상기 보고 내용과 같이 7차 감리용역 계약 시행 및 감리용역 계약의뢰코자 하며

○ 전기감리원 추가배치는 지하층 주차장 설치공사 설계변경 후 우리본부의 승인을 받은 후 배치토록 함

붙임 : 1) 감리용역계약 요청공문 및 감리검토의견서 각1부.

2) 총차 감리원 배치 및 내역서 1부.

2) 7차 감리원 배치•계약 내역서 각1부.  끝.