문서번호	토목부-25927
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	12/29 노우성
협조

명덕초등학교 앞 교통안전시설 설치 검토보고 (구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

명덕초등학교 앞 교통안전시설 설치 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

명덕초등학교앞 도로 확장공사와 관련 어린이보호구역내 안전시설 설치 요청 민원에 대한 검토 보고 임.

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 명덕초등학교 주변에 보행자 안전 휀스 설치가 공사에 미반영 되어 있음

명덕초등학교

연장 L=260m (130경간)

■ 민원내용

◦ 구리암사대교가 개통됨으로 통행 차량이 많아짐에 따라 명덕초등학교 주변 어린이 보호구역내 학생들의 무단횡단을 방지하기 위한 안전휀스 설치요구 (학부모 및 명덕초등학교 교장선생님)

■ 안전휀스 단가검토

◦ 조달청 등재된 업체 단가 검토

구 분	㈜디엔테크	㈜우일휀스	화련(주)	비 고
단 가	369,000원	394,000원	450,000원	H=1.0m W=2.0m
	○

■ 감리단 검토의견

〇 본 공사는 구리암사대교가 개통됨에 따라 차량통행이 많아져 명덕초등학교로부터 어린이 안전을 위해 안전휀스를 설치 요구한 사항으로

〇 조달청에 등재된 안전시설물로 관급 발주하여 시급히 조치하여 안전을 확보토록 하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

■ 조치 의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당 하다고 사료됨.

- 소요예산 : 증) 48백만원(관급자재비)

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.