문서번호	자연생태과-1222
결재일자	2013.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
이영일	김상근	윤주경		01/23 오해영
협 조

2013년 유수지 습지 생태복원 추진계획

2013. 1

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	관련자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 유수지 습지 생태복원 추진계획

유수지 본래의 저수기능 등에 지장 없는 범위 내에서 물억새, 갈대, 부들 등 습지식물을 식재하고, 생태관찰학습장, 산책로 등을 조성하여 사람과 자연이 공생하는 친환경 휴식공간을 확충하고자함

※ 자연생태과-707(‘13.1.14) 생태복원업무 기본계획과 관련임

Ⅰ		사업개요

위    치 : 구로1동 683번지 (신구로 유수지)

사업규모 : 40,322㎡

사업내용 : 보행용 데크 설치(L=400m), 기존시설 정비, 안양천 접근환경 개선

사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 10

총사업비 : 720백만원

※ 연차별 추진계획(세부 추진현황 별첨)

구 분	계	2008~2011	2012	2013	2014~
유수지 습지 생태복원사업	총19개소 258,270㎡	13개소 186,948㎡	2개소 13,000㎡	1개소 40,322㎡	3개소 18,000㎡
예산액(백만원)	9,959	5,509	1,630	720	2,100

사업대상지 현황

위치도	현황사진

Ⅱ		추진방향

유수지 본래의 저수기능에는 지장을 주지 않는 범위 내에서 물억새, 부들, 수련 등의 수생식물과 수목을 식재하여 자연생태계 복원

여유 공간에 그늘목, 관상수 식재로 녹지량을 확충하고 습지생태계를 관찰 할 수 있는 생태관찰 학습장 및 산책로 등을 조성하여 주민 휴식 공간으로 제공

유수지 사면에 수목, 초화류 및 지피류 등을 식재

Ⅲ		추진일정 및 방법

추진일정

- 2013. 1      : 사업 추진계획 수립 및 시행기관 통보

- 2013. 1 ~ 5  : 설계용역 시행

- 2013. 6 ~10  : 공사 시행

※ 장마철 우기를 고려하여 하천공사를 시행하되, 가급적 서민경제를 고려하여 예산을 조기에 집행

추진방법 : 해당 시행기관에 예산 재배정 시행

Ⅳ		세부 추진 방법(추진상의 유의사항)

설계단계부터 관련 전문가를 참여시키고, 생물종 복원 중심의 습지 생태복원 추진

유수지 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업을 추진

설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례가 없도록 조치

설계용역시 설계변경 등 주요사항은 우리시와 사전 협의

시설물의 디자인 및 색채 등은 『공원시설 색채디자인 가이드라인』 과 『안내체계 매뉴얼』 준수

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

기타 유수지 습지 생태복원 사업 추진에 따른 세부사항은 『생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)』, 『서울특별시 전문시방서(조경편, 2009년)』, 『서울시 자연생태계 회복을 위한 생태복원 이론과 실무(2005년)』 참조

Ⅴ		추진절차 및 행정사항

사업추진 계획 수립․통보(자연생태과 ⇨ 시행기관)	: ‘13. 1. 25일 까지

용역타당성 심사(시행기관⇨기술심사담당관)	: ‘13. 1. 25 ~ 2. 20

설계 용역 시행(시행기관)	: ‘13. 2.    ~ 5. 30

- 설계용역 추진시 우리시에 2회(중간 및 최종) 이상 추진사항 보고

- 공사착공전 시 하천관리과 및 자치구 유수지 관리부서와 협의 등 제반절차 이행

설계심의(시행기관⇨자연생태과, 기술심사담당관)	: ‘13. 4. ~ 5.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

- 설계심의 : 공사금액 10억 미만은 자연생태과, 10억 이상은 기술심사담당관

계약심사(시행부서⇨계약심사과)	: ‘13. 4. ~ 5.

- 계약심사 : 공사금액 3억(조경) 이상 시 계약심사담당관

특정제품 선정위원회 심사(시행부서⇨재무과)	: 물품구매 및 공사 발주시

- 특정제품의 품명당 가격이 2천만원을 초과하는 경우

- 특정한 설비․기술이 요구되는 추정가격이 2천만원을 초과하는 물품제조의 경우

공사시행(시행기관)	: ‘13. 6. ~ 10.

공사 착․준공보고 : 발주는 6월초 이전, 준공은 최소 10월말까지 완료

- 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공내역서, 공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

별   첨 : 1. 시설공사 업무처리 프로세스 1부.

2. 유수지 습지 생태복원사업 추진현황(2008~ ) 1부.

3. 공원시설 색채디자인 가이드라인 1부.

4. 생태하천 복원사업 추진지침(환경부) 1부.

5. 특정제품 선정절차 개선안 방침서 사본 1부. 끝