문서번호	시설보수과-10412
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	12/29 조병준
협조
	주무관		윤신식

기성금 지급 (1회)

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

「2014년 개봉고가차도 보수공사」 기성금 지급(1회)

‘2014년 개봉고가차도 보수공사’에 대한 기성금 지급을 위한 기성검사(감독)조서(1회)가 시설관리공단으로부터 접수되어 처리계획을 보고 드림

※ 시설관리공단 공사감독1처-14480(2014.12.29)

현   황

공 사 명 : 2014년 개봉고가차도 보수공사-강서

계약업체 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

계약물량

- 포장보수공 : 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부(방수) 재포장 10a

- 콘크리트보수공 : 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m

- 배수시설정비공 : 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소, 교량배수구 관세정 370m, 배수구 구멍뚫기 43개소

- 기타보수공 : 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m, 슈청소공 82개소, 케이블보호용덮개보수 72개소

- 부  대  공 : 공간비계설치 1,725㎡, 보호막(분진·방진망) 설치 1,897㎡, 가설사무실·창고, 트럭크레인(10톤) 480HR 등

계약금액 : 1,145,350,430원 (도급비)

계약기간 : 2014. 9. 22 ~ 2015. 3. 20.

기성(1차) 신청 내역

구 분	계약금액	기 성 내 역		누 계	비 고
		전회(기성)	금회(1차)
공 급 가 액	1,041,227,664	0	716,090,000	716,090,000
부가가치세	104,122,766	0	71,609,000	71,609,000
계	1,145,350,430	0	787,699,000	787,699,000	68.77%

처리계획

포장보수공 완료, 콘크리트보수공·배수시설정비공·기타보수공이 진행중으로 2014년 12월 29일 현재 실공정률이 약 75% 이상 진행되었으므로 감독기관인 시설관리공단의 기성검사(감독)조서(제1회)에 기성(1차) 716,090천원(기성율 68.77%) 지급은 문제가 없음

‘2014년 개봉고가차도 보수공사’ 기성(1차) 신청에 대하여 관리단속과에서 지급되도록 처리하고자 함.

붙 임 : 기성검사(감독)조서(제1회) 및 기성내역서 등 관련문서 1부.  끝.