투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 내용 통보(서남권야구장건립공사)

1. 서야책감 2014-302(2014.12.22.) 및 건축부-3931(2014.03.31.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인「서남권야구장건립공사」의 토목공종 하도급 변경계약이 체결되었기에 아래와 같이 통보합니다.

<하도급 변경계약 내용>

수급인	하수급인 (하도업체)	하도급 공사명	하도급 기간	하도급 금액(원)		하도급 율(%)	변경사유
				변경 전	변경 후
현대산업개발 (주)	야림 건설(주)	토목 공사	‘09.4.13 ∼‘15.2.28 (변경없음)	4,610,555,400	5,125,855,900	87.25	기존하도급 내용에 우․오수공사 추가

첨 부 : 책임감리 검토 보고서 및 하도급 변경계약서 1부. 끝.

	건축부장
★주무관	조영두		건축총괄과장	강성욱		건축부장	전결 12/29 김우성
협조자	주무관	윤용훈
시행	건축부-15681	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문동 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02 3708-2656	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개