문서번호	시설보수과-10413
보존기간	년
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	12/29 조병준
협조

여의2교 보수공사 준공 보고

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

여의2교 보수공사 준공 보고

우리사업소에서 시행한 『여의2교 보수공사』에 대한 준공보고 및 준공검사 조서가 감독기관인 시설관리공단으로부터 제출되어 내용검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 여의2교 보수공사

공사기간 : 2014. 5.12 ~ 2015. 1. 6

공사개요 : 받침장치 보수공 28개소, 바닥판 연결공 2개소,

콘크리트 균열보수 667.9m 등

도 급 액 : 607,940천원

도 급 자 : 거현산업(주)  박기옥

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		보고내용

공사비 변경

○ 관련근거

- 시설관리공단 공사감독1처-14538(2014.12.29)호 “준공정산 보고”

○ 보험료 미사용에 따른 정산 : (감) 18,940천원(제경비 포함)

구 분	당 초	변 경	비고
계	12,836,483	0
건강보험료	2,928,173	0
연금보험료	4,288,913	0
노인장기요양보험료	191,795	0
환경보전비외 2건	5,427,602	0

○ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변경(준공)	증·감		비고
도급비	공급가액	552,672,728	535,454,546	감)	17,218,182
	부가가치세	55,267,272	53,545,454	감)	1,721,818
	계	607,940,000	589,000,000	감)	18,940,000

예비준공검사 완료

○ 일  시 : ‘14. 12. 19(금)

○ 참가자 : 발주청 - 시설보수과장, 주무관 천석기

감독청 - 강남공사관리처 공사감독 이동호

시공사 – 거현산업(주) 현장대리인 임한규

○ 예비준공검사 내용

- 여의2교 공사에 대한 전반적인 사항 등 준공전 미흡사항 사전 확인

○ 예비준공검사 결과

- 총평 : 신축이음 연결부 시공상태 양호, 아스콘포장 시공상태 양호,

단면보수 및 균열보수 시공상태 양호, 배수홈통 시공상태 양호

- 지적사항 : 특이사항 없음

Ⅲ		검토의견

○ 본 준공(정산)은 시공사에서 납입확인서를 제출한 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요약보험료)와 환경보정비외 2건에 대하여 정산(감액) 처리한 것으로 공사비 변경은 타당함.

Ⅳ		조치계획

○ 감독기관인 시설관리공단에서 제출한 준공검사(감독)조서에 준공(정산)내용이 기반영 되었으므로, 준공대가 지급시 보험료를 정산토록 관리단속과(계약담당자)에 통보하고자 합니다.

붙 임  1. 준공검사(감독) 조서

2. 준공정산 보고서(공단)

3. 준공내역서(정산). 끝.