함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	***************
(경유)
제 목	지체상금 부과결정 통보(유수율 저조블록 원인규명 용역)

1. 항상 우리시 상수도 행정발전에 협조하여 주셔서 감사합니다.

2. 우리사업소와 귀사간에 계약체결하여 시행한 『유수율 저조블록 원인규명용역』건이 지연 준공되었기에 지연기간에 대하여 “지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제90조 및 동법 시행규칙 제75조”의 규정에 따라 아래와 같이 지체상금을 부과 고지하오니 기한내 납부하여 주시기 바랍니다.

가. 계약사항

계약업체		계약금액(원)	계약일자	준공기한	준공일자	준공검사일
상 호	대표자
*****	***	86,500,000	2014.03.31	2014.10.31	2014.12.23	2013.12.26

나. 지체상금 부과액 : 금12,110,000원(금일천이백일십일만원)

- 지체일수 : 56일

- 지체상금율 : 1000분의 2.5(0.25%)

- 산출내역 : 계약금액 × 지체상금율 × 지체일수

(86,500,000원× 2.5/1000 × 56일 = 12,110,000원)

다. 납부의무자 : ***********

*********************

라. 예산과목 : 상수도사업수익, 영업외수익, 기타영업외수익, 잡수익

붙임 : 지체상금 고지서 1부(별도송부).  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	은정호		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	전결 12/29 서경만
협조자
시행	행정지원과-27387	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개