보    고    서

등록번호	시설관리과-35071

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	이생기	최명익	12/29 나태산

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2014.   12.

복 명 자 : *************

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014-1 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량-38	*********	2014.12.20 ~12.31	2015.2.27	분기점 폐쇄지점 확인불가로 겨울철 동절기 굴착에 어려움이 있어 동절기 헤제 이후로 연기하고자 함.
개량-40	********	2014.12.23 ~2015.1.05	2015.2.27	세입자와 협의후 공사가능(수요가측에서 겨울철 지나서 공사원함)으로 공사완료시까지 연기하고자 함.
개량-41	*********	2014.12.23 ~2015.1.5	2015.2.27	수요가와 협의후 공사진행 예정으로 (수요가의 추위지나서 공사원함)공사 가능시까지 연기하고자 함.

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 공사일정 재협의 후 공사완료시까지  작업연기 하고자 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.