문서번호	도시철도설비부-12048
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
남궁영주		서태창	12/29 정찬웅
협조

- 지하철 9호선 915공구 건설공사(전기) -

설계변경(전기분야) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 9호선 915공구 건설공사(전기) 관련 -

설계변경(전기분야) 검토 보고

지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(전기)에 대한 설계변경(제1차)요청이 있어 검토 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 지하철 9호선 915공구 건설공사

○ 시 공 사 : 경남기업(주), 대원건설산업(주)

○ 사업기간 : 2008.06.02 ～ 2014.12.31(전기 2013.01.29 ~ 2014.12.31)

○ 계약금액 : 99,630,000,000원(전기 3,725,000,000원)

□ 관련근거

○ 동일(현)제14 - 980(2014.12.29)호“915공구 정거장 전기공사 9차분 설계변경 요청”

□ 설계변경내용

○ 사업비 변경(전기)

구 분		공사금액(원)			공사기간
		변경전	변경후	증 ‧ 감
전기	합 계	3,725,000,000	4,384,906,000	659,906,000	'13.01.29 ~'14.12.31
	8차공사	2,052,970,000	2,052,970,000	0
	9차공사	1,672,030,000	2,331,936,000	659,906,000

○ 주요 설계변경 내용

연번	설계변경 내용	증 ‧ 감액(원)	비 고
1	변압기 2차측 저압간선케이블을 BUS-DUCT로 변경	27,545,590
2	에너지관리장치 설치	254,239,000
3	비상조명 DC등 변경	△ 32,767,990
4	전기실 무정전전원장치 용량변경	△ 17,692,000

연번	설계변경 내용	증 ‧ 감액(원)	비 고
5	정거장 조명연출용 건축경관조명 변경	1,646,820
6	승강장 PSD구간 터널조명 설치	30,641,840
7	돌출환기구, 외부엘리베이터 경관조명, 특별피난계단 조명등기구 변경	△ 3,589,540
8	LED 조명기구 변경	333,671,280
9	소방 바닥유도등 회로구성 변경	60,815,000
10	정거장 수익시설 확충에 따른 변경공사	5,396,000
계		659,906,000

□ 향후 조치계획

○ 전기부분 설계변경 내용을 관련부서인 도시철도계획부, 도시철도토목부에 통보

○ 지하철 9호선 2단계 915공구 감리단에 설계변경 내용을 통보하고자 함.

따로붙임 :	1. 설계변경내역서 1부(별도 송부)
	2. 915공구 정거장 전기공사 9차분 설계변경 요청서 1부. 끝.