함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	사고이월에 따른 선금 처리[북부수도사업소 공릉배수지 외 15개소 정밀안전진단 용역]

1. 급수운영과-23957(2014.12.24.)호와 관련입니다

2. 우리사업소 급수운영과에서 발주하여 계약체결한 「북부수도사업소 공릉배수지 외 15개소 정밀안전진단 용역」와 관련하여 준공기한이 2015.02.28.일로 연장됨에 따라 사고이월되어, 기지급한 선금에 대하여 아래와 같이 선금대금 처리하고자 합니다.

가. 계약건명 : 북부수도사업소 공릉배수지 외 15개소 정밀안전진단 용역

나. 계약상대자 : 주식회사 한국시설안전연구원 대표 안평기

에스큐엔지니어링(주)  대표 이래철

다. 계약금액 : 금243,390,000원

라. 계약기간

- 당초 : 2014.06.02 ~ 2014.12.28

- 변경 : 2014.06.02. ~ 2015.02.28

마. 사고이월사유 : 구조안전성 검토 및 시공방안 협의지연과 대상구조물 설계자료 부족에 따른 추가 조사내용 발생.

바. 선금지급액 : 금121,695,000원(2014.06.23, 당초 계약금액의 50%)

- 한국시설안전연구원 : 금 73,017,000원

- 에스큐엔지니어링(주) : 금 48,678,000원

사. 선금대금 처리방법

- 지방자치단체입찰 및 집행기준 제6장 선금,대가지급 요령 제5항에 의거 선금을 지급한 후 사고이월시 반환청구하여야 하나,

- 사고이월이 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유에 의한 것인 동시에 선금 지급액을 당해 계약목적 달성을 위한 노임지급 및 자재확보 등에 사용하였음이 증명되는 때에는 선금을 회수하지 않아도 됨으로( 유권해석 회계 41301-3553)

- 상기 공사건에 대하여 선금사용내역서를 2014.12.17.일로 제출함에 따라로 반환청구하지 않고 이월처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 사고이월 보고서  및 용역변경계약체결통보서 각 1부

2. 선금사용내역서 및 선급금보증서 각 1부

3. 유권해석자료 1부  끝.

주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	12/29 정의석
협조자
시행	행정지원과-23118	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-3245	/전송		/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개