문서번호	교통운영과-1577
결재일자	2013.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교통운영과장	교통운영관		★도시교통본부장
권세봉	마국준	박영섭		01/27 윤준병
협 조
	교통운영팀장		최정수
	신호시설팀장		이기모
	교통개선팀장		박용우

｢교통소통개선, 도시고속도로 기능개선, 횡단보도 설치｣

′13년 교통소통 및 보행 관련 공사 ･ 설계 용역 시행 계획

2013. 1. 25(금)

도시교통본부

교 통 운 영 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 교통소통개선, 도시고속도로 기능개선, 횡단보도 설치 -

′13년 교통소통 및 보행 관련 공사 ･ 용역 시행 계획

교통운영 개선으로 원활한 교통흐름과 안전을 위한 ｢교통소통개선사업｣ 도시고속도로 주요 정체지점 기능개선을 위한 ｢도시고속도로 기능개선사업｣ 보행자의 이동편의 증진과 보행권 확보를 위한 ｢횡단보도 설치사업｣의 추진계획과 이를 위한 설계 용역을 시행코자 함.

Ⅰ		사업 현황

도로교통 소통개선사업

2013년 사업대상 : 43개소

- 자치구, 경찰서, 시의회 등 개선요구 및 자체조사 발굴

- ’12년도 설계완료 : 종로구 세검정길 등 23개소

- ’13년도 추진사업 : 동대문구 사가정로 등 20개소(설계 49개소 중 시행)

사 업 비 : 4,760백만원

사업내용 : 주요정체 도로 및 불합리한 교통체계 개선

- 토목시설 : 보도조정, 가각정리, 교통섬 설치 등

- 교통시설 : 차로 조정, 신호등 및 노면표시, 교통안전표지 설치 등

도시고속도로 기능개선사업

2013년 사업대상 : 3개소

- 정체구간 및 불합리한 도로․교통체계 개선, 비효율적인 교차로 개선

- ’13년 추진사업 : 3개소

▷ 북부간선도로 : 묵동IC 진출입로

▷ 동부간선도로 : 군자교 진출로, 장안교 진출로

※ ’12년 이월사업 3개소 (공사기간 : ’12. 6 ~ ’13. 6)

철산교~금천IC, 철산교 진출입램프, 반포IC 진출램프

사 업 비 : 983백만원

사업내용

- 도로여유폭을 활용한 추가차로 확보, 도시고속도로 진출입연결로 구조 개선 등

횡단보도 확충 및 정비사업

2013년 사업대상 : 11개소

- 자치구, 민원사항 등 개선을 요구하는 지점 및 추진계획에 의하여 시행

- 종로구 광화문 삼거리 등 11개소(설계29개소 중 시행)

사 업 비 : 1,331백만원

사업내용

- 횡단보도 미설치 지점, 보도육교 및 지하보도 등 보행이 불편한 지점 개선

- 신호기, 횡단보도 노면표시, 보도턱 낮춤 등 보행동선을 활용한 개선

Ⅱ		추진 계획

도로교통 소통개선사업

추진 일정

- ’12년도 이월사업(23개소)

▷ ’13. 02 ~ ’13. 03 : 예산 재배정(도로사업소, 자치구)

▷ ’13. 03 ~ ’13. 08 : 공사 시행

- ’13년도 추진사업(20개소)

▷ ’12. 10 ~ ’12. 12 : 2013년 사업 대상지 수요조사

(해당자치구, 경찰서, 시위원 요구사항, 자체발굴 등)

▷ ’13. 02 ~ ’14. 01 : 설계용역 시행

▷ ’13. 06 ~ ’13. 08 : 예산 재배정 및 공사발주(도로사업소, 자치구)

▷ ’13. 08 ~ ’13. 12 : 공사 시행

추진실적 및 계획

<연도별 추진현황>                                                 (단위 : 개소 / 백만원)

사업명	구 분	계	’09	’10	’11	’12	’13계획
계(사업비)		30,354	7,905	5,625	5,807	6,257	4,760
교통축 종합개선	연장(㎞)	91	23	30	20	18	-
	사업비	11,652	4,597	3,313	2,550	1,192	-
도로교통 소통개선	지점수	166	38	19	32	34	43
	사업비	18,702	3,308	2,312	3,257	5,065	4,760

※ 2013년 대상지점 붙임참조

추진절차

- 설계 및 모니터링 용역수행 : 교통운영과

- 공사시행 : 토목 및 교통안전시설 설치 □ 자치구, 신호기 설치 □ 도로사업소

도시고속도로 기능개선사업

추진 일정

- ’13. 2 ~ ’13. 3 : 예산재배정(도로사업소 및 도시기반시설본부)

- ’13. 3 ~ ‘13. 8 : 공사 시행

추진실적 및 계획

<연도별 추진현황>                                                 (단위 : 개소 / 백만원)

사업명	구 분	계	’10	’11	’12	’13계획	’14이후
도시고속도로 기능개선	지점수	22		실시설계	3	3	16
	사업비	6,603		260	1,140	983	4,220

※ 2013년 대상지점 붙임참조

추진절차 : 공사시행(도로사업소 및 도시기반시설본부 등)

횡단보도 확충 및 정비사업

추진 일정

- ’13. 2 ~ ’14. 1 : 설계용역 과업 수행

- ’13. 6 ~ ’13. 8 : 예산 재배정 및 공사발주(도로사업소, 해당자치구)

- ’13. 8 ~ ’13. 12 : 공사 시행

추진실적 및 계획

<연도별 추진현황>                                                 (단위 : 개소 / 백만원)

사업명	구 분	계	’09	’10	’11	’12	’13계획
횡단보도 확충 정비사업	지점수	77	14	26	12	14	11
	사업비	8,571	2,150	2,150	1,470	1,470	1,331

※ 2013년 대상지점 붙임참조

추진절차

- 설계용역 수행 : 교통운영과

- 공사시행 : 토목 및 교통안전시설 설치 □ 자치구, 신호기 설치 □ 도로사업소

Ⅲ		설계용역 추진계획

도로교통 소통개선사업

기본 및 실시설계 시행

- 주요정체 및 불합리한 교통체계 개선 49개소(강북 24개소, 강남 25개소)

모니터링 및 분석

- 2012년 개선사업의 공사완료 지점과 민원 요청(의원요구포함)지점 중 변화추이 분석이 필요한 지점 20개소(강북 10개소, 강남 10개소)

주요내용

- 차로 조정, 전용차로 확보, 신호체계 개선 등 TSM 기법을 활용한 개선안 도출

- 사업 시행 전후 교통여건 변화 분석

횡단보도 확충 및 정비사업

기본 및 실시설계 시행

- 보행자의 이동편의 및 보행불편지점 29개소(강북 15개소, 강남 14개소)

주요내용

- 신호기, 횡단보도 노면표시, 보도턱 낮춤 등 보행동선을 활용한 개선안

용역기간 : 착공일로부터 12개월

용역업무 체계도

사업대상 선정 (시, 해당자치구, 경찰서 등)	⇒	기본 및 실시설계 시행 (서울경찰청 업무협의 포함)	⇒	공사 시행 (해당 자치구, 사업소)

용 역 비 : 총 423,606천원

도로소통개선사업 시설비(401-01) : 423,606천원

▷ 강북권역 : 209,364천원

• 2013 기본 및 실시설계 39개소(소통 24개소, 횡단보도 15개소), 모니터링 10개소

▷ 강남권역 : 214,242천원

• 2013 기본 및 실시설계 39개소(소통 25개소, 횡단보도 14개소), 모니터링 10개소

예산과목 : (단위)교통소통 및 안전관리 강화, (세부)도로교통소통개선(편성목)시설비(202-401-01)

Ⅳ		행정사항

개선공사

'12년도 설계완료 및 설계중인 교통소통개선사업 23개소와 도시고속도로 기능개선 사업대상으로 설계 완료한 간선도로인 성수진출로 ~ 성수대교북단 구간은 교통소통개선사업으로 시행.

공사 추진 시 신호기 공사 관련 책임감리는 총괄감리용역 발주 시행.

(교통운영과 신호시설팀)

설계용역

횡단보도 확충사업 설계는 교통소통개선사업을 위한 설계용역에 포함하여 시행

교통소통개선사업의 동대문구 휘봉초교앞 과 횡단보도확충사업의 청계4가교차로, 소월길 동광빌딩 앞은 규제 완료된 지점으로 기본설계는 제외하고 실시설계용역만 수행

「2013년 설계용역」은 사업 추진의 효율성을 기하기 위하여 강북･강남권역으로 분리하여 발주

	강북지역			강남지역
종로, 중구, 용산, 동대문, 중랑, 성북, 도봉, 은평, 마포구			양천, 강서, 구로, 영등포, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동구

붙임 : 1. 개선사업 및 설계용역 대상지점 LIST 1부.

2. 용역사업 설계내역서(강남, 강북) 각 1부.  끝.

붙임자료1

#1. `13년 교통소통개선사업 대상지점 LIST

공사 및 설계용역 대상지점 : 총 72개 지점(공사 43개소, 설계 49개소)

연번		구분	자치구	지점(구간)	개선내용	선정사유
공사	설계
1		교차로	종로구	세검정길 평창치안센타, 서울예고	비보호좌회전 신설	`12년 설계완료
2		교차로	중랑구	면목4동 삼익아파트앞	차량신호등 추가설치 등	“
3		교차로	성동구	성수진출로 ~ 성수대교 북단	보도제거후 1개차로 증설 등	도시고속도로 기능개선 설계완료
4		교차로	중구	퇴계5가 교차로	보도확장	`12년 설계중
5		교차로	광진구	영동대교 북단교차로	차로재구획	“
6		교차로	동대문구	청량리역 교차로	유턴신설	“
7		교차로	동대문구	신답역 교차로	차로재구획	“
8		교차로	중랑구	면목 빗물펌프장앞	보도확장	“
9		단일로	성북구	길음교하부~돈암1동주민센터	차로재구획	“
10		교차로	성북구	아리랑고개입구 교차로	차로재구획	“
11		교차로	서대문구	홍은사거리	차로재구획	“
12		교차로	서대문구	인왕아파트 교차로	차로재구획	“
13		교차로	마포구	합정역 교차로	우회전전용 신호등 설치	“
14		교차로	양천구	홍익병원 교차로	차로수 조정	“
15		단일로	강서구	홈플러스 앞	횡단보도 및 중앙선 이설	“
16		교차로	강서구	신방화 사거리	우회전차로 설치	“
17		교차로	영등포구	당산중학교 삼거리	횡단보도 및 차로재구획	“
18		교차로	관악구	신림119안전센터 앞	차로재구획 및 신호기조정	“
19		교차로	서초구	구룡터널 교차로	도로선형 개선	“
20		교차로	서초구	반포IC~교보타워사거리	차로재구획	“
21		교차로	강남구	싸리고개공원 교차로	유턴신설	“
22		교차로	송파구	천호사거리	좌회전대기 차로 연장	“
23		단일로	강동구	배재중학교 앞	차로 확장	“
24	1	단일로	동대문구	장안벚꽃로 휘봉초교 앞	횡단보도 설치	구청요청(규제완료)
25	2	교차로	동대문구	사가정로	가변차로제 폐지 등	구청요청(민원)
26	3	교차로	동대문구	중랑교 교차로	가각정리 및 차로 조정	구청요청
27	4	교차로	동대문구	고산자교 북측	차로 선형 조정	우리시 민원
28	5	교차로	동대문구	용두동사거리	보도가각정리	우리시 민원
29	6	교차로	성북구	성북재활용센터 앞 교차로(솔샘로)	횡단보도 이전	구청요청
30	7	교차로	성북구	성북경찰서 앞 교차로(삼선교로)	우회전 전용차로 확보	구청요청
31	8	교차로	도봉구	녹천교 교차로	우회전 교통섬 확대	우리시 민원
32	9	교차로	은평구	진흥로 대조· 불광시장 삼거리	좌회전차로 연장	구청요청
33	10	교차로	마포구	망원정오거리	교통섬설치	경찰서 요청
34	11	교차로	양천구	국립과학수사연구소 입구 사거리	신호기 위치조정	구청요청
35	12	교차로	강서구	염창동 나이아가라호텔 앞 교차로	보도셋백	구청요청
36	13	교차로	구로구	미래빌라 앞 교차로	좌회전신설	구청요청(민원)
37	14	교차로	구로구	구로구 개봉동 70-92번지	횡단보도 위치조정	구청요청(민원)
38	15	교차로	영등포구	양남동사거리	차로재구획	구청요청
39	16	교차로	영등포구	영등포로터리	안전지대 보강	사업소 요청
40	17	단일로	관악구	양지병원 앞	유턴신설	구청요청
41	18	교차로	관악구	낙성대입구 사거리	좌회전신설	경찰서 요청
42	19	단일로	송파구	진주아파트 정문 앞	보도확장	주찬식 의원 요청
43	20	교차로	송파구	올림픽공원 삼거리	도로선형개선	주찬식 의원 요청

연번		구분	자치구	지점(구간)	개선내용	선정사유
공사	설계
	21	교차로	중구	남대문 교차로 주변	소월길방향 직진 신설	경찰서 요청
	22	교차로	중구	남대문경찰서 앞	유턴 신설	경찰서 요청
	23	교차로	용산구	미군부대 앞	차로재구획	우리시 민원
	24	단일로	용산구	청파로 서계GS주유소 앞	차로확장	경찰서 요청
	25	교차로	동대문구	월곡역입구	직진차로 추가 확보	경찰서 요청
	26	교차로	성북구	고려대 앞 삼거리	우회전 차로 폭 조정	우리시 민원
	27	교차로	은평구	백련산길 충암고 앞	보도셋백 차로 확장	구청요청
	28	교차로	은평구	수색로 중앙차로 구간	중앙차로구간 점선 설치	경찰서 요청
	29	교차로	은평구	평화타이어 앞	중앙차로구간 점선 설치	경찰서 요청
	30	교차로	은평구	수색역 주차장입구 앞	중앙차로구간 점선 설치	경찰서 요청
	31	교차로	은평구	갑진약국 앞	중앙차로구간 점선 설치	경찰서 요청
	32	교차로	은평구	GS 가스충전소 앞	중앙차로구간 점선 설치	경찰서 요청
	33	단일로	은평구	통일로 질병사거리~박석고개	중앙분리대 설치	경찰서 요청
	34	교차로	마포구	중암교 사거리	보도가각정리	구청요청
	35	교차로	양천구	오목지하차도 상부	차로재구획	구청요청
	36	교차로	양천구	양강중학교 앞	신호기 보강	구청요청
	37	교차로	양천구	신곡시장 KB은행앞	차로재구획	구청요청
	38	교차로	강서구	동신아파트 앞	차로재구획	구청요청
	39	교차로	강서구	발산역	차로재구획	구청요청
	40	교차로	구로구	미성아파트 교차로	교차로 축소	구청요청
	41	단일로	구로구	구로지하차도 앞	차로재구획	구청요청구청요청
	42	교차로	구로구	고대구로병원 앞	보도셋백	구청요청
	43	교차로	영등포구	양평동사거리	좌회전신설	구청요청
	44	교차로	관악구	현대시장입구 사거리	횡단보도 위치조정	구청요청
	45	교차로	관악구	봉천고개 사거리	교통섬신설	구청요청
	46	교차로	서초구	서초제일약품 앞	차로재구획	구청요청
	47	교차로	강남구	신사역	차로재구획	구청요청
	48	교차로	강남구	(구)역삼세무서	좌회전공간 연장	구청요청
	49	교차로	강동구	한영중고 앞 교차로	보도셋백	구청요청

※ 자치구와 협의를 통하여 개선효과가 큰 지점을 선정하여 우선추진

모니터링 대상지점 : 총 20개 지점

연번	구분	자치구	지점(구간)	비 고
1	4지	광진구	건대입구 교차로
2	4지	강북구	미아사거리
3	4지	광진구	구의사거리
4	3지	성동구	동2로 프라임병원 앞
5	4지	동대문구	청량리 유턴
6	3지	서대문구	자연사 박물관~연희지하차도
7	3지	성북구	길음교 하부~돈임1동 주민센터
8	3지	성북구	아리랑고개입구 교차로
9	3지	동대문구	사가정로
10	4지	동대문구	중랑교교차로
11	4지	양천구	등촌로 홍익병원 교차로
12	2지	강서구	화곡로 홈플러스 앞
13	5지	강서구	양천로 신방화사거리
14	4지	금천구	벚꽃로36길 가산동 스타밸리 앞 교차로
15	4지	영등포구	양평로 당산동6가 당산중학교삼거리
16	3지	관악구	봉천로 신림119안전센터 앞 교차로
17	4지	서초구	사평대로 반포IC~교보타워사거리
18	4지	강남구	도곡로 싸리고개공원 교차로
19	2지	송파구	올림픽로 천호사거리
20	4지	강동구	고덕로 배재중학교 앞 교차로

#2. `13년 도시고속도로 기능개선사업 대상지점 LIST

연번	도로명	지점명	주요 개선내용	비고
1	서부간선	철산대교 상부 진출입 연결로	‣ 철산교 상부 연결로 접속부 기하구조 개선 및 진출입통행체계 변경	2012년 추진중, 2013년 이월사업
2		철산대교∼금천IC	‣ 본선구간(철산교→ 금천IC) 중분대 및 측방여유폭 폭원 축소시켜 1개차로 추가 설치(2→3차로)
3	경부고속	반포IC	‣ 반포IC 진출부 보행자 작동신호기 설치로 횡단보행자 안전 확보 ‣ 본선구간(서초IC→한남대교) 버스전용차로 해제지점변경으로 버스와 일반차량간 상충 완화
4	북부간선	묵동IC 진출입로	‣ 화랑대 사거리 방면 진출로 1개 차로 증설(2→3차로) ‣ 화랑대 사거리 신호운영 변경 및 보도 Setback을 통한 1개 차로 증설	2013년 추진사업
5	동부간선	장안교 교차로	‣ 장안교 서측 장안지하차도 교차로상 차량 유도선 및 진행방향 노면표시 보강 설치 ‣ 장안교 동측 동부간선도로(의정부 방향) 우진출로와 사가정길 합류지점 서행 노면표시 보강 및 가각부 안전지대 재설치
6		군자교 진출로	‣ 동부간선도로(의정부 방향) 본선에서 좌진출(장한평 방향) 연결로 개설 ‣ 진출로 개설에 따른 비상정차대 이전 설치 ‣ 진출로 개설에 따른 차량진행방향 안내표지판 및 노면표시 변경 설치
7		성수진출로∼ 성수대교 북단	‣ 뚝섬로 용비교→성수대교 북단 교차로 구간 보도 제거 후 1개 차로 증설 ‣ 용비교→성수대교 방향 우회전 도류로 1개 차로 증설(교통섬 축소) ‣ 차량진행방향 안내표지판 및 노면표시 보완 설치	소통개선사업으로 추진

#3. `13년 횡단보도 확충사업 대상지점 LIST

연번		구분	자치구	지점(구간)	개선내용	비 고
공사	설계
1	1	4지	종로구	예지동 청계4가 교차로	남측 1면 신설	`12년도 추진사업(규제완료)
2	2	4지	용산구	남산 소월길 동광빌딩 앞	1면 신설	`12년도 추진사업(규제완료)
3	3	4지	종로구	재동 안국역교차로	남측 1면 신설	`12년도 추진사업(동측완료)
4	4	3지	성동구	행당동 응봉삼거리	북측 1면 신설	`12년도 추진사업
5	5	단일로	강동구	길동 대성주유소	1면 신설	`12년도 추진사업
6	6	3지	종로구	광화문 삼거리	서측 1면 신설
7	7	4지	종로구	안국동 교차로	서측 1면 신설
8	8	4지	종로구	흥인지문 교차로	동측 1면 신설
9	9	3지	중구	시청 앞 교차로	남측 1면 신설
10	10	4지	관악구	봉천동 1575-1 영락고교입구	동측 1면 신설
11	11	단일로	동대문구	전농동 삼성아파트 앞	1면 신설
	12	3지	성동구	송정동 주민센터입구	북측 1면 신설
	13	3지	중구	중림동 교차로	남측 1면 신설
	14	단일로	중구	신한은행남대문지점	1면 신설
	15	단일로	송파구	잠실동 22-7 잠실2동주민센터 앞	1면 신설
	16	단일로	동대문구	장안동 동원빌딩 앞	1면 신설
	17	단일로	강동구	암사동 488-21 LG마트 앞	1면 신설
	18	4지	강남구	역삼동 756-18 선경한의원 앞	1면 신설
	19	단일로	강동구	천호동 428-3 오복빌딩 앞	1면 신설
	20	4지	강서구	등촌동 612-4 새한약국 앞	남측 1면 신설
	21	단일로	강서구	화곡동 114-109 더와이즈병원 앞	1면 신설
	22	단일로	강남구	도곡동 467-18 우성캐릭터	1면 신설
	23	단일로	강동구	길동 411-5 농협 길동지점	1면 신설
	24	단일로	강동구	둔촌동 64 둔촌2동 주민센터 입구	1면 신설
	25	3지	종로구	세검정초교 앞	1면 신설
	26	4지	강동구	명일동 320-2 명일역사거리	대각선 신설
	27	4지	양천구	신월동 631 강월초교입구사거리	북측 1면 신설
	28	단일로	강동구	성내동 450-46 동양상사 앞	1면 신설
	29	4지	용산구	중앙경리단 앞	북측 1면 신설