투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	행위허가(토지형질변경 및 산지전용)기한 연기 요청

1. 푸른도시과-5884(2014.04.16)호와 관련입니다.

2. 『구리암사대교 연결도로 건설공사』의 개발제한구역내 행위 허가와 관련 아래와 같이 변경 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

나. 위    치 : 강동구 암사동 산20-1 ~ 산36-13(56필지)

다. 공사개요 : 도로개설 폭 6차로, 연장 1.88km

라. 허가기간

- 당 초 : 행위허가일로부터 ~ 2014.12.31.

- 변 경 : 행위허가일로부터 ~ 2015. 6.30.

마. 변경사유 : 공사 준공기한 연기

붙  임 : 1) 신청서 1부.

2) 위치도및사업계획서 각1부(용량과다로 별도 송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상철		광역도로과장	최광무		토목부장	12/29 노우성
협조자
시행	토목부-25862	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개