문서번호	정수시설과-9111
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식	현인식	12/29 임정규

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

[전기설비 유지보수공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

정수시설과

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행중 물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의 의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

공사현황

공 사 명 : 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : (주)윤송이엔씨 대표 정윤계

도 급 액 : 금51,938,900원

착 공 일 : 2014. 4.10

준공기한 : 2014.12.31

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 공업6급 김오열

위   원 : 공업6급 오재승 외2명, 간사 1명

일   시 : 2014.12.26(금) 17:30 ~ 18:30(2층 사무실)

안   건 : 전기설비 유지보수공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

신규공종 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초	변경
공급가액	47,217,182	39,351,819	감)7,865,363
부가가치세	4,721,718	3,935,181	감)786,537
도급비계	51,938,900	43,287,000	감)8,651,900

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙 임 : 심의 의견서 1부.  끝.