투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울과학관건립공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	설계변경자문소위원회 조치결과 승인 알림

1. 정과감 제14-214(2014.11.17.)호와 관련입니다.

2. 2014.10.14. 실시한 서울과학관 건립공사‘설계변경 자문 소위원회’지적사항의 조치결과에 대한 귀하의 검토의견을 아래와 같이 승인함을 알려드리며, 설계변경 계약이 이루어지도록 신속히 조치바랍니다.

○ 소위원회 조치결과

구분	신청금액	조치결(원)		비고
		조정금액	증감
도급공사비	232,467,368	231,820,139	-647,229	직접비 기준
관급자재비	-46,178,170	-46,178,170	0
합계	186,289,198	185,641,969	-647,229	조경 공사금액 제외

※ 건축공사비(건축/토목/조경) 조정 예상액

구분	당초	변경	증감
도급비	9,977,692,610	10,241,362,610	263,670,000
관급자재비	2,751,686,162	2,705,507,992	-46,178,170
총공사비	12,729,378,772	12,946,870,602	217,491,830

붙임 : 관련문서(정과감 제14-214호) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
지방시설사무관대우	윤승근		환경시설과장	신명승		건축부장	11/20 김우성
협조자
시행	건축부-13893	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2474	/전송	3708-2489	/		/	부분공개(5)