함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지체상금 부과결정 [유수율 저조블록 원인규명 용역]

1. 시설관리과-34916호(2014.12.26.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행한 『유수율 저조블록 원인규명용역』건에 대하여 계약상대자 【(주)상원 대표:곽필정】가 준공 지연하였기에 지연기간에 대하여 “지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제90조 및 동법 시행규칙 제75조”의 규정에 따라 아래와 같이 지체상금을 부과하고자 합니다.

가. 계약사항

계약업체		계약금액(원)	계약일자	준공기한	준공일자	준공검사일
상 호	대표자
*****	***	86,500,000	2014.03.31	2014.10.31	2014.12.23	2013.12.26

나. 지체상금 부과액 : 금12,110,000원(금일천이백일십일만원)

- 지체일수 : 56일

- 지체상금율 : 1000분의 2.5(0.25%)

- 산출내역 : 계약금액 × 지체상금율 × 지체일수

(86,500,000원× 2.5/1000 × 56일 = 12,110,000원)

다. 납부의무자 : ***********

*********************

라. 예산과목 : 상수도사업수익, 영업외수익, 기타영업외수익, 잡수익

붙임 : 준공검사조서 1부.  끝.

★주무관	은정호		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	12/30 안운길
협조자
시행	행정지원과-27435	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개