문서번호	시설과-6480
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
채민수	代신재현	한성현		12/30 안해칠
협 조

『2014년 공원등 정비공사(연간단가)』

설계변경(3차) 계획 보고

2014. 12.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『2014년 공원등 정비공사(연간단가)』

설계변경(3차) 계획 보고

우리사업소에서 시행중인 「2014년 공원등 정비공사(연간단가)」의 신규공종 추가 및 계약물량 조정 등 설계변경 사유 발생에 따른 변경 계획 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 2014년 공원등 정비공사(연간단가)

❍ 계약일자 : 2014. 3. 10.

❍ 착공일자 : 2014. 3. 10.

❍ 준공기한 : 2015. 2. 28.

❍ 계약금액 : 금104,952,400원

❍ 도 급 자 : 임피던스 대표 김경민

Ⅱ		설계변경 검토내용

❍ 설계변경 사유 : 신규공종 추가 및 계약물량 조정

❍ 주요 변경내용

구 분	공 종	규 격	단위	변경물량
				당초	변경
월드컵공원 근로자 대기실 정비에 따른 전원인입 공사	케이블 배선	F-CV 6㎟/4C	m	0	65
	분전반 설치	sus,500*500	면	0	1
선유도공원 녹색기둥의 정원 지중등 정비공사	지중등 교체	LED20W	EA	0	43
	분전반 설치	500*500	면	0	1
클럽하우스 개선 전기공사	등기구 설치	LED면조명	EA	0	4

❍ 설계변경 금액

공 사 비		금 액		증·감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		104,952,400원	114,595,000원	(증) 9,642,600
구분	공급가액	95,411,273원	104,177,273원	(증) 8,766,000
	부가가치세	9,541,127원	10,417,727원	(증) 876,600
	합 계	104,952,400원	114,595,000원	(증) 9,642,600

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 상기 변경사항을 반영하여 설계변경(3차)계약 시행코자 함.

첨부 : 변경내역서 1부.  끝.