문서번호	서북병원원무과-1490
결재일자	2013.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김병용	강지식	조기현		01/30 김한선
협 조
	간호부장		하명주
	진료부장		임현석

서북병원음압유지시설 및 화장실설치공사

준공전 사전검사 계획

2013. 1

서북병원 원무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서북병원음압유지시설 및 화장실설치공사

준공전 사전검사 계획

서북병원 음압유지시설 및 화장실설치공사 준공일에 앞서 사전 준공 검사를 실시하여 공사품질 확보 및 미비사항 시정 보완하여 사업 추진에 만전을 기하고자함.

1	추진현황

1) 총사업비 - 1,322백만원 (음압병상설치:922백만원, 병실화장실설치:400백만원)

2) 사업규모

○ 동관 16~17병동 음압시설 설치

- 시설설치 : 자동도어설치, 천정마감재교체,

- 설치장비 : 공조기, 자동제어시설, 직원근무지 클린유니트 설치

○ 동관 14 ~17병동 화장실설치

- 6인병상 화장실(36개소) 설치, 세면기설치

- 개인용 가구설치, 병실 반자동도어 설치

3) 공사기간 - 2012. 9. 10 ~ 2013. 2. 6 (150일)

4) 공사금액 : 1,185,353,430원

○ 건축 : 451,097,600 - 국내건설(주) 심재록

○ 설비 : 439,355,840 - (주)서령엔지니어링 박주호

○ 전기 : 132,829,990 - (주)백두전설 임종민

○ 장비 : 162,070,000 - (주) 두인이엔지 권기산

2	사전검사계획

1) 검사일시 : 2013. 1. 30 (수)  16:00 ~ 17 :00

2) 점검위원 : 병원장, 간호부장, 진료부장, 원무과장, 시설팀장

※ 시공사 현장대리인등 입회

3) 검사대상 : 금회공사범위 전체 (14~17병동, 옥상)

4) 검사내용

○ 당해공사 전체의 시공내용 및 품질확인

○ 환자 및 이용자의 이용 편의성 등

5) 검사방법 : 별첨 체크리스트에의한 현장확인

3	행정사항

○ 지적사항 시정 : 2013. 2. 4(월)한

- 시정 전후 사진 부착

첨    부 : 체크 리스트 1부. 끝.