문서번호	서북병원원무과-1493
결재일자	2013.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김병용	강지식	조기현		01/30 김한선
협 조

서북병원 음압유지시설 및 병실내 화장실 설치공사 2차설계변경보고

2013.  1

서북병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

서북병원 음압유지시설 및 병실내화장실 설치공사 2차설계변경보고

서북병원 음압유지시설 및 병실내화장실 설치공사와 관련 공사중 발생 한 물량변경이 있어 아래와 같이 설계변경 하고자함.

1	공사개요

○ 공 사 명 : 서북병원 음압유지시설 및 병실내화장실 설치공사

○ 공사기간 : 2012. 9. 6 ~ 2013. 2. 6(150일)

○ 공사내용

- 4~7층 병실내 화장실설치 : 반자동문 설치, 병실재배치(3:3→2:4)

- 6,7층 음압유지시설 : 자동도어, 천정마감재 변경, 공조덕트설치등

○ 시공업체 : 건축 - 국내건설(주) / 설비 - (주)서령엔지니어링

○ 도급금액 : 890,453,440원 (건축-451,097,600원 / 설비-439,355,840원)

2	설계변경 내용 및 변경금액

1) 변경내용

○ 건축의 구조보강 공법 변경(서북병원원무과-1076 ‘13.1.22)

대상	당초	변경후	변경사유
7층 천정	강선+탄소섬유	탄소섬유	설계사의 의견에 따라 구조기술사의 검토에 의거 변경

○ 건축의 도어 변경 (금액변경 없음)

구분	당초	변경후	변경사유
간호사실	스텐레스 도어포켓	유리마감	간호사실에서 환자관찰어려움으로 변경요청
배선용 승강기룸	스텐레스 도어포켓	색유리 마감	병실분위기를 고려 부드러운 느낌의 유리마감 변경

※ 당초 16병동간호사실을 색유리 포켓도어로 설치하였으나 간호부 요청에 의거 변경

※ 변경에 따른 비용검토 결과 변경시 비용증대(견적확인)

2) 변경금액

구분		당초금액	변경금액	증감	비고
총공사비		890,453,440	887,925,940	- 2,527,500
도급비	공급가액	809,503,128	807,205,400	- 2,297,728
	부가가치세	80,950,312	80,720,540	- 229,772
	계	890,453,440	887,925,940	- 2,527,500

(단위: 원)

2) 건축설비

구분		당초금액	변경금액	증감	비고
총공사비		451,097,600	448,570,100	- 2,527,500
도급비	공급가액	410,088,728	407,791,000	- 2,297,728
	부가가치세	41,008,872	40,779,100	- 229,772
	계	451,097,600	448,570,100	- 2,527,500

(단위: 원)

3) 기계설비 : 변경없음

3	조치계획

○ 변경된 공사 물량으로 설계변경을 시행하고, 서울시에 설계변경 계약의뢰 하고자함.

첨    부 :  변경 설계서 2부. 끝.