문서번호	도로시설과-1783
결재일자	2013.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	한강교량팀장	도로시설과장	시설안전정책관
김창환	하현석	이용심	01/31 고인석

- 2013년 한강교량일상유지보수공사 -

전면책임감리용역 시행계획

2013.  1.

도 시 안 전 실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 2013년 한강교량일상유지보수공사 -

전면책임감리용역 시행계획

2013년 한강교량 일상유지보수공사의 정밀시공, 품질확보 등 견실한 시공을 위한 전면책임감리용역 시행계획 보고임

※ 3년간(2011년~2013년) 장기계속계약으로 용역 시행중

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한강교량일상유지보수공사 전면책임감리 용역

○ 용역기간 : 2011. 4. 25 ~ 2014. 2. 28(3년 장기계속 계약)

○ 과업내용 : 한강교량(20개소) 일상유지보수공사 책임감리

○ 용 역 사 : ㈜신성엔지니어링  대표 정찬섭

○ 용 역 비 : 총괄 812,500천원

○ 용역수행 내역

구 분	계	2011년 (1차)	2012년 (2차)	2013년 (3차)	비고
용역비	812,500천원	270,000천원	342,000천원	200,500천원
투입 인원	감리원 67.24인․월	감리원 23.1인․월	감리원 30.04인․월	감리원 14.1인․월

□ 현안사안

○ 당초 감리용역은 본청(교량관리과)에서 단일공구로 발주한 한강교량일상유지보수 공사를 대상으로 계약되었으나

○ 2012년에는 한강교량일상유지보수공사의 공구 분리(1, 2공구) 및 한강대교보수공사 감리 병행 수행에 따라 보조감리원 증원이 필요하여 2013년 투입될 인원을 선 투입 하였고(‘12.9.18 시설안전정책관 방침)

○ 2012년 10월1일자 조직개편으로 2013년 일상유지보수공사는 5개 도로사업소에서 분할 시행할 예정으로

○ 5개 공구의 감리에 투입할 감리원 부족(현재계획 : 감리원 14.1인․월)

- 주요공종인 야간포장공사 등 20개 교량의 원활한 감리 업무 수행 곤란

※ 책임감리는 연차계약에 의해 본청 도로시설과에서 발주 및 시행

□ 조치계획

○ 한강교량은 우리시를 대표하는 주요 시설로 일상유지보수공사의 품질향상 등 견실한 시공을 위해 감리원 투입계획 조정시행

- 책임감리원 1명, 보조감리원 2명의 연간(12개월) 상주 필요

- 상대적으로 공정이 한가한 동절기에는 보조감리원 1명만 상주

- ‘12년 수준에 준하여 ’13년 예산규모 감안 투입인원 산정

○ 감리원 투입계획 조정내역                            (단위 : 인․월)

구 분	년도별 예산액				비고
	전 체	2011년	2012년	2013년 계획
당 초	67.24	23.1	30.04	14.1
변 경	85.54	23.1	30.04	32.4

□ 행정사항

○ 한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리용역 변경시행

《총차 설계변경》

∙용역기간 : 2011. 4. 25 ~ 2014. 2. 28

∙변경내역                                          (단위 : 천원 / 인․월)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도급비	812,500	996,600	(증) 184,100
투입인원	67.24	85.54	(증) 18.3

《3차(2013년) 계약》

∙용역기간 : 2013. 2. 21 ~ 2014. 2. 28

∙변경내역                                         (단위 : 천원 / 인․월)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도급비	200,500	384,600	(증) 184,100
투입인원	14.1	32.4	(증) 18.3

※ 현장사무실 설치비용 포함

□ 향후일정

○ 금차(3차) 용역 발주 및 전체분 변경계약(2013. 2)

○ 용역 착수 및 감리업무 수행(2013. 2. 21 ~ 2014. 2. 28)

별   첨 : 1. 감리원 투입계획

2. 책임감리 연간업무 현황비교

【별첨 1】

감리원 투입계획

구 분	인․월	2011년					2012년						2013년						비고
		4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
책임 감리원	34.20																		당초
	34.20																		변경
보조 감리원 1	24.60																		당초
	32.90																		변경
보조 감리원 2	8.44																		당초
	18.44																		변경
연도별 투입인원 비교		〈책임감리원〉 당초 : 10.2(인․월) 변경 : 10.2(인․월) 〈보조감리원 합계〉 당초 : 12.9(인․월) 변경 : 12.9(인․월)					〈책임감리원〉 당초 : 11.6(인․월) 변경 : 11.6(인․월) 〈보조감리원 합계〉 당초 : 18.44(인․월) 변경 : 18.44(인․월)						〈책임감리원〉 당초 : 12.4(인․월) 변경 : 12.4(인․월) 〈보조감리원 합계〉 당초 : 1.7(인․월) 변경 : 20.0(인․월)

【별첨 2】

책임감리 연간업무 현황 비교

□ 한강교량일상유지보수공사 연간업무 비교

구 분		2011년	2012년		2013년(예상)
공구 수		1개	3개 (증 2)		5개 (증 4)
감리 주요 업무	1회업무수행시간(일)	수량	수량	1개 공구 발생에 따른 업무 증가량	예상 수량	산출근거
시공계획 검토 및 보고	1	95건	98건 (↑3)	1.5	101건	95+(1.5건×4공구)
긴급출동 확인	0.7	89회	104회 (↑15)	7.5	119회	89+(7.5회×4공구)
검측(입회 및 확인)	0.5	436회	490회 (↑54)	27	544회	436+(27회×4공구)
야간작업 입회	1	45회	60회 (↑15)	7.5	75회	45+(7.5회×4공구)
완료보고(검토,확인)	1	89회	98회 (↑9)	4.5	107회	89+(4.5회×4공구)
착공신고서 검토	2	1회	2회 (↑1)	0.5	3회	1+(0.5회×4공구)
하도급(변경)계약 검토	2	24회	28회 (↑4)	2	32회	24+(2회×4공구)
자재공급원 검토	1	30회	35회 (↑5)	2.5	40회	30+(2.5회×4공구)
실정보고	3	3회	10회 (↑7)	3.5	17회	3+(3.5회×4공구)
설계변경	5	1회	8회 (↑7)	3.5	15회	1+(3.5회×4공구)
기성검사	2	4회	12회 (↑8)	4	20회	4+(4회×4공구)
준공검사	3	1회	3회 (↑2)	1	5회	1+(1회×4공구)
월간 공정보고 작성	2	12회	13회 (↑1)	0.5	14회	12+(0.5회×4공구)

□ 2012년 감리업무 세부수량 및 소요인원

감리업무	실적수량 (회)	1인1회업무 수행시간 (일)	총소요시간 (일)	소요감리원 (인․월)	비고
시공계획 검토 및 보고	98	1	98	4.46	1월=22일 (감리대가기준)
긴급출동 확인	104	0.7	73	3.32
검측(입회 및 확인)	490	0.5	245	11.14
야간작업 입회	60	1	60	2.73
완료보고(검토,확인)	98	1	98	4.46
착공신고서 검토	2	2	4	0.18
하도급(변경)계약 검토	28	2	56	2.55
자재공급원 검토	35	1	35	1.59
실정보고	10	3	30	1.36
설계변경	8	5	40	1.82
기성검사	12	2	24	1.09
준공검사	3	3	9	0.41
월간 공정보고 작성	13	2	26	1.18
소 계				36.29
업무 동시수행 감안	※ 실제투입 30.04 ÷ 계산값 36.29 = 82% ⇒ 동시수행 조정요율을 20%정도로 산출				실제투입 30.04

□ 2013년 감리업무 예상수량 및 소요인원

감리업무	예상수량 (회)	1인1회업무 수행시간 (일)	총소요시간 (일)	소요감리원 (인․월)	비고
시공계획 검토 및 보고	101	1	101	4.59	1월=22일 (감리대가기준)
긴급출동 확인	119	0.7	83	3.77
검측(입회 및 확인)	544	0.5	272	12.36
야간작업 입회	75	1	75	3.41
완료보고(검토,확인)	107	1	107	4.86
착공신고서 검토	3	2	6	0.27
하도급(변경)계약 검토	32	2	64	2.91
자재공급원 검토	40	1	40	1.82
실정보고	17	3	51	2.32
설계변경	15	5	75	3.41
기성검사	20	2	40	1.82
준공검사	5	3	15	0.68
월간 공정보고 작성	14	2	28	1.27
소 계				43.49
업무 동시수행 조정요율 적용	※ 공구증가에 따른 업무중복 확대 및 '13년 예산 감안 조정요율 (↓25%) 적용 ⇒ 43.49 × 0.75 = 32.61				32.4투입