문서번호	조경과-1392
결재일자	2013.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
김대호	한정훈	이원영	01/31 오해영

2013년 기찻길 옆 녹지조성 추진계획

2013. 1.

푸른도시국

(조  경  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	시민참여 사업 전개	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	해당 자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 기찻길 옆 녹지조성 추진계획

기찻길 옆 경계부지의 유휴공지를 집중 녹화하여 녹지량을 확충하고 불량가시권 정비 및 소음 ․ 분진 저감 등을 통해 시민들에게 쾌적한 도시환경을 제공하고자 함

Ⅰ				기 본 방 향

소음 ․ 분진 완화 및 불량경관을 차폐할 수 있는 완충수림대 조성

경관저해 요인을 해소할 수 있는 수종선정 및 식재패턴 도입

여유공간에 주민 편의를 위한 휴게시설 도입으로 이용 활성화

나무심기에 지역주민, 시민단체 등이 참여하는 방안 적극 추진

Ⅱ				추 진 개 요

대 상 지 : 경부선 등 8개노선 식재 가능지

사업내용 : 수림대 및 쉼터조성, 주민 편의시설 설치 등

사업기간 : 2001 ~ 2016(계속)

총사업비 : 7,895백만원(’12년이전 6,235, ’13년 160, ’14년이후 1,500)

Ⅲ				추 진 실 적

위    치 : 동대문구 휘경동 98-2 중앙선 철도변 등 47개소

조성면적 : 71,829㎡

사업기간 : 2001 ~ 2012

구 분	계	철 도 연 변 수 림 대 조 성
		2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
개 소 수	47	4	3	5	7	1	1	7	4	6	5	4
사업비 (백만원)	6,235	144	108	582	348	380	200	662	477	1,076	1,263	995

Ⅳ				2013년 사업계획

중점추진사항

- 설계 ․ 조성(나무심기 등) ․ 사후관리 시 지역주민, 시민단체 적극 참여 추진

※ 자치구 실정에 맞추어 지역주민이 참여하는 나무심기 추진위원회 등 구성

- 사업대상지 기존 수목은 최대한 존치하면서 불법경작지 등 녹화

- 사계절 녹색물결이 넘실대도록 다층구조로 상록․낙엽수 혼합식재

사업개요

- 대 상 지 : 마포구 연남동 243 일대(경의선) 1개소

- 규    모 : 900㎡

- 사업내용 : 수림대 및 주민 쉼터 조성 등

- 사업기간 : 2013. 1 ~ 11월

- 사 업 비 : 160백만원(시설비)

- 시행기관 : 마포구(공원녹지과)

- 예산과목 : 조경과, 생활주변녹지확충, 녹지벨트구축, 기찻길옆녹지조성,

시설비및부대비, 시설비(401-01)

추진일정

- 2013. 1월       : 사업계획 수립 및 시달

- 2013. 2월 ~ 3월 : 실시설계, 주민의견수렴, 설계심의 시행

- 2013. 4월 ~10월 : 공사발주, 시행

- 2013. 11월      : 공사준공

Ⅴ				행 정 사 항

2013. 3. 15까지 공사 설계심의 완료 및 조기집행 추진

조경과 설계심의 결과에 따라 공사비 조정 배정 및 공사시행

사업착공 및 준공보고 : 5일이내

붙 임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 착공(준공)보고 서식 1부.  끝.