투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	현대산업개발(주) 강남순환도시고속도로7-1공구 공구대리인 박상우
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연장 승인통보(강남순환7-1공구)

1. 도로보수과-3086호(2014.05.29.),현산개 강남순환 제2014-262호(2014.12.30.)와 관련입니다

2. 위 호와 관련으로 추진중인 “강남순환도로 사당IC신설공사현장 주변 교통안전시설물 설치공사”의 준공기한 연장 요청에 대해 아래와 같이 승인통보 합니다

가. 공 사 명 : 강남순환도로건설공사(7-1공구) 교통안전시설물 설치공사

나. 공사기간 : 2014.6.18. ~ 2014.12.31

다. 위치/내용 : 사당IC신설 공사현장 주변 / 노면표시공사

라. 원 인 자 : 현대산업개발(주)

마. 준공기한연기 : 당초 2014.12.31. 변경 2015.03.31

바. 연기사유 : 선행공정인 토목공사지연에 따른 공기연장.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		도로보수과장	12/30 김승태
협조자
시행	도로보수과-7261	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개