투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(1공구) 책임감리원 귀하
(경유)
제목	2015년 1월 1주 휴일 및 주중 야간 근무계획 승인 통보

1. 평감(우이) 제2014-507호(2014.12.29)와 관련입니다.

2. 「우이-신설 경전철 민간투자사업 건설공사(1공구)｣와 관련 2015년 1월 1주 휴일 및 주중 야간 근무계획을 다음과 같이 승인 통보하오니 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일 근무자 및 작업현황

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용	비고
01. 01(목)	-	휴 무	-
01. 03(토)	주 간 (감리원 2인)	∘ 차량기지 : 검사선, 유치선 이동통로 거푸집 설치 ∘ L01정거장 : 16~17SP 받침 벽체 거푸집 설치 ∘ 본선2구간 : 2~3SP(방학연장선) 기초철근 조립 ∘ L02정거장 : 비상건넘선 SLAB Con`c 타설 ∘ L03정거장 : 연결통로 1단 벽체 거푸집 설치	*** ***
01. 04(일)	주 간 (감리원 1인)	∘ 차량기지 : 검사선, 유치선 이동통로 거푸집 설치 ∘ L01정거장 : 집수정, 정화조 벽체 거푸집 해체 ∘ 본선2구간 : 16~17SP, 6~7SP 1단 벽체 방수 ∘ L02정거장 : 연결통로 4단 띠장 및 우각부 해체 ∘ L03정거장 : 본선4구간 기둥 철근 조립	***

나. 야간 작업 주요내용 및 감리자 근무자 현황

구 분	작업구간	작업일시	작업내용	근무자
야간작업	L01정거장 본선2구간 L02정거장 L03정거장	2015.01.05(월)~01.09(수) 18:00~20:00 (2시간)	∘현장 정리 정돈 ∘철근 조립 및 배근 ∘거푸집 설치 ∘동바리 설치	감리1명

구분	01.05(월)	01.06(화)	01.07(수)	01.08(목)	01.09(금)	비고
야간작업	***	***	***	***	***

다. 휴일 및 야간근무 승인조건

∘ 휴일 및 야간작업 시행 2일전 세부 작업계획을 수립하고 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기하고 공사 관리에 공백이 발생되지 않도록 근무자 정위치 준수 하시기 바랍니다.

∘ 지하매설물 관련 규정을 숙지하여 이행하고, 안전수칙을 지켜 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

∘ 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일 주간 시행

∘ 휴일작업에 감리원은 1~2인 근무(주간)하며 감리비는 시공사 부담(입찰안내서 제6장 과업내용서 6.2.2 규정에 의거 원인자 부담)

라. 업무지시

∘ 「안전관리 기본준수 20대 항목」 준수 하시기 바랍니다.

∘ 야간 작업 시행시 소음, 진동 발생에 따른 주민불편사항이 발생하지 않도록 현장 관리 철저를 기하시기 바랍니다.

∘ 야간 작업 시행시 건설공사장내 시거확보를 위한 적정 조도 유지 등 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다.

∘ 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인 조건 이행여부 지도감독 및 품질․안전관리 철저를 기하시기 바랍니다.

∘ 감리자 및 현장 공사 관리자는 휴일 및 야간 작업사항, 시공계획서, 시공 상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치되도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

∘ 휴일 및 야간 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업을 시행하시기 바랍니다.

∘ 사고발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 상황보고 하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정영호		경전철2과장	이승우		도시철도사업부장	12/30 이은상
협조자	주무관	김정수
시행	도시철도사업부-8843	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7188	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(6)