투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통지-2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

물재생과-7565(2014.12.24)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약금액 : 증 금5,997,000원(금오백구십구만칠천원)

- 변 경 : 금782,840,000원(금칠억팔천이백팔십사만원)

- 당 초 : 금776,843,000원(금칠억칠천육백팔십사만삼천원)

다. 계 약 일 : 2014년  05월  02일 (변경계약일 : 2014년 12월 26일)

라. 착 공 일 : 2014년  05월  08일

마. 준공기한 : 58일 연장

- 변 경 : 2015년  02월  27일

- 당 초 : 2014년  12월  31일

바.  변경사유 : 신공종 발생 및 물량 증감

사. 계약업체 : 홍익산업개발(주) (대표 정연용)

(☎ 02-2109-8757)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	12/30 김홍덕
협조자
시행	관리과-16010	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개