문서번호	건축부-14363
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		★환경시설과장	건축부장
윤승근		신명승	12/01 김우성
협 조
	조경시설과장			신용우
	주무관			이민영
	주무관			임봉규

서울과학관 건립공사

차수조정 등 제1회 설계변경 보고

2014.12.

도시기반시설본부

(건축부)

서울과학관 건립공사

차수조정 등 제1회 설계변경 보고

서울과학관 건립공사와 관련, 책임감리원으로부터 차수조정을 포함한 설계변경 검토의견이 제출되었기 제1회 설계변경계약 검토 보고임.

건축)   지방시설주사  윤 승 근

토목) 지방시설주사보  이 민 영

조경) 지방녹지주사보  임 봉 규

□ 공사개요

○ 위    치 : 노원구 한글비석로 168(하계동 산11) 일대

○ 규    모 : 지하1층, 지상3층. 연면적 12,330㎡

○ 공사기간 : 2014.01.13. ～ 2016.01.12.

(1차 : 2014.01.13. ～ 2014.12.25.)

○ 도급금액 : 9,977,692천원 (1차 : 2,541,000천원)

○ 감 리 자 : ㈜정림건축종합건축사사무소 외2 (책임감리원 : 이경용)

○ 시 공 자 : 키움건설(주) 외2 (현장대리인 허동호)

□ 주요 추진경위

❍ ‘11. 07. 22. : 서울시, 교과부, 기재부 업무협약체결

❍ ‘13. 10. 10. : 설계도서 인수 (미래부 → 서울시)

❍ ‘13. 10. 10. : 서울과학관 건립사업 추진계획 (시장방침)

❍ ‘13. 12. 26. : 책임감리용역 계약 (‘14. 01. 06. 착수)

❍ ‘13. 12. 31. : 공사 계약 (‘14. 01. 13. 1차 공사 착수)

❍ ‘14. 02. 28. : 착공식 개최

❍ ‘14. 04. 18. : 관급(콘크리트 파일) 발주검토(건축부-4786)

❍ ‘14. 04. 30. : 폐기물처리용역 계약

❍ ‘14. 05. 09. : 매립폐기물(건설폐토석) 처리방안 (건축부-5696호)

❍ ‘14. 07. 11. : 기초 설계변경도서 송부 (건축부→책임감리원)

❍ ‘14. 07. 17. : 기초 파일공사 설계검토 자문회의 결과보고 (건축부-8791호)

❍ ‘14. 08. 29. : 1차 공사 공기연장 계약

❍ ‘14. 10. 14. : 설계변경자문소위원회 개최

❍ ‘14. 11. 17. : 설계변경자문소위원회 조치결과 보고 (책임감리원→건축부)

❍ ‘14. 11. 24. : 차수조정 실정보고 (책임감리원→건축부)

□ 설계변경내용

○ 주요변경사항

구 분	주 요 항 목	비고
설계개선 또는 변경사항	∙기존건물 석면철거 누락 반영 ∙매립폐기물(건설폐토석) 발생 반영 ∙관급 PHC파일 사급전환 및 공법변경 ∙매립폐기물 발생으로 잔토처리량 변경 ∙지장수목 철거 및 임목폐기물 증가 ∙착공식 안전시설 설치실비 반영 등
차수조정	∙빗물저류조 설치 등 골조 및 토공 조정 ∙조경 수목 재이식 차수조정 등 ∙운반비 조정 및 간접공사비 수정 등

○ 변경내역

- 총괄

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총 차	9,977,692,610	10,241,362,610	263,670,000
1 차	2,541,000,000	2,541,000,000	0	차수조정
장 래	7,436,692,610	7,700,362,610	263,670,000

- 분야별

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
합 계	9,977,692,610	10,241,362,610	263,670,000
건 축	7,365,913,931	7,646,663,495	280,749,564
토 목	1,586,067,395	1,542,412,822	-43,654,573
조 경	1,025,711,284	1,052,286,293	26,575,009

- 관급재

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
합 계	2,751,686,162	2,705,507,992	-46,178,170
건 축	2,421,388,722	2,375,210,552	-46,178,170
토 목	88,041,765	88,041,765	0
조 경	242,255,675	242,255,675	0

□ 검토 및 처리방안

○ 검토의견

- 각각의 설계변경은 책임감리원의 실정보고를 통해 사전승인을 득하였고, 설계변경 소위원회 자문을 실시하여 그 결과를 내역에 반영한 것이며,

- 1차 공사의 경우 계약금액 내에서 기한 내 준공 가능하도록 계약내역을 합리적으로 (차수)조정한 것임.

○ 처리방안

- 위 검토한 바와 같이 설계변경 및 차수조정에 대한 책임감리원의 검토의견은 적정하므로 공사도급금액 변경과 차수조정을 위한 제1회 설계변경계약(총차분 금액변경, 1차분 내역변경)을 추진토록 승인코자함.

붙임 : 감리기술검토의견서 등 관련 서류 1부. 끝.