투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)신명건설기술공사
(경유)	(도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 책임감리원)
제목	실정보고 승인 통보[관악산 저류조 통신공사]

1. 도림천(감) 2014-302(2014.12.01)호, 293(2014.11.24)호, 289(2014.11.21)호와 관련된 문서입니다.

2. 수방기간 종료에 따른 임시운영설비(분전반․RCS반) 재설치 등에 따른 실정보고(설계변경)사항에 대하여 승인하오니 공사현장 안전관리 및 품질확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 주요사항

구 분	주요 변경내용	비고
버들골 공대폭포	수방기간 종료에 따른 RCS반 재설치(당초계획)에 따른 시공물량 정산	공사분
계측제어	수방기간 종료에 따른 RCS반 재설치 상황실 시스템 모듈화에 따른 키보드․마우스 추가설치 수위표 설치(저류조 내부 3개, 서울대정문 유입 1개)	관급자재 (총액)
CCTV 및 방송설비	음성콘트롤 운영을 위하여 오디오믹서 추가설치 버들골 저류조 유입․출부 CCTV 추가설치	관급자재 (3자단가)

□ 설계변경금액

구 분		당초	변경	증 감
합 계		671,100,700	697,490,500	증 26,389,800
도 급 비		193,380,000	197,230,000	증 3,850,000
관	계	477,720,700	500,260,500	증 22,539,800
급	계측제어	342,232,000	351,054,000	증 8,822,000
비	CCTV․방송	135,488,700	149,206,500	증 13,717,800

붙임 : 실정보고(감리) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	12/03 김창균
협조자
시행	설비부-13656	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8638	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개